문서번호	시설과-3215
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
신상현	조민형	代하종식	12/17 최현실
협 조
	주무관		김재희

『개포로 녹지연결로 조성공사』

설계변경 검토 보고

2019. 12.

동부공원녹지사업소

(시    설    과)

『개포로 녹지연결로 조성공사』

설계변경 검토 보고

「개포로 녹지연결로 조성공사」와 관련, 실정보고 현황에 의거 설계변경  검토 보고 드림

1		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 개포로 녹지연결로 조성공사

❍ 위    치 : 강남구 개포동 175-3 일대(개포동)

❍ 기    간 : 2019. 7. 29. ~ 2020. 2. 28.

*******************************

****************

- 주계약자 *****************

- 부계약자 *********************

- 부계약자 *******************

❍ 공사내용 : 녹지연결로 설치(폭15m, 연장 35m)

******************************

2		설계변경 검토

❍ 추진경위

- 2019. 10. 01 : 개포로 녹지연결로 조성공사 실정보고(1차)

- 2019. 10. 15 : 개포로 녹지연결로 조성공사 실정보고(2차)

- 2019. 10. 30 : 개포로 녹지연결로 조성공사 실정보고(3,4차)

- 2019. 11. 18 : 개포로 녹지연결로 조성공사 실정보고(5차)

- 2019. 12. 11 : 개포로 녹지연결로 조성공사 실정보고(6차)

- 2019. 12. 16 : 개포로 녹지연결로 조성공사 실정보고(7차)

❍ 설계변경 내용

구분	설 계 변 경 내 용	비고(천원)
토목 분야	○현장 여건에 맞게 사토장 위치 변경 - 현장 주변 → 경기도 화성 사토장	증50,820 (실정보고 1차)

구분	설 계 변 경 내 용	비고(천원)
토목 분야	○안전사고 방지를 위한 EGI 가셀휀스 설치 - 휀스설치 1개소 : 연장 83m, 높이 2.4m	증5,610 (실정보고 2차)
	○공사 진행을 위한 저촉 가로등 이설 - 가로등 이설 : 1주	증5,390 (실정보고 3차)
	○현장 여건에 맞게 기초보강 콘크리트 반영 - 콘크리트 타설 : 61 → 121㎥	증7,463 (실정보고 4차)
	○현장 여건에 맞게 북측 교대 줄파기 수량 조정 - 줄파기 : 1 → 55m	증5,170 (실정보고 5차)
	○안전사고 방지를 위한 보행도우미 및 신호수 추가 배치 - 보행도우미 : 0 → 78인 - 신호수 : 10 → 11인	증16,747 (실정보고 6차)
	○현장 여건에 맞게 간격유지철근 물량 조정 - 철근가공 및 조립 : 1.820 → 4.922톤 - 철근운반비 : 1.929 → 5.220톤	증6,724 (실정보고 7차)
토공 분야	○현장 여건에 맞게 토공물량 조정 - SLIM 물량 : 0 → 167㎥ - 순성토 물량 : 0 → 1,023㎥ - 다짐물량 : 0 → 3,028㎥	증49,500 (실정보고 7차)
조경 분야	○현장여건에 맞게 식재 수량 변경 - 지장수목 이식 : : 강남구청 요청사항 반영 - 교목 : 소나무 등 13종 161주 추가 식재 - 초화류 : 구절초 등 7종 56,845본 추가 식재 - 관목 수량 변경 : 사철나무 3,700→3,300주 화살나무 450→0주 ○주민편의를 위한 목재계단 정비 및 신설 - 목재계단 정비 0→1개소, 신설 0→1개소	증145,009 (실정보고 7차)

❍ 공사비 증감(내역 참조)

구 분		공 사 비 (원)			비고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		2,545,201,000	2,793,602,000	증)248,401,000
도급액	공급가액	1,400,777,272	1,671,224,546	증)270,447,274
	부 가 세	140,077,728	167,122,454	증)27,044,726
	계	1,540,855,000	1,838,347,000	증)297,492,000
관급자재		1,004,346,000	954,331,000	감)50,015,000

❍ 예산 검토

(단위 : 천원)

**	****** ***	*** ***	*** ***	**** ***	**** ***	********* *************
**	*********	*********	*********	*****	******	*******

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 시설과, 생태계복원 및 보전과 야생동식물 보호, 생태계 복원사업, 단절된 녹지축 연결, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)(푸른도시국 자연생태과)

❍ 준공기한 연기

- 동절기 기온 저하로 콘크리트 타설 시 품질저하 및 하자 발생 우려

(동절기 공사기간 중지 : 2020. 1. 1 ~2020. 2. 28(59일간))

- 공사물량 증가에 따른 추가 작업일수 소요(33일)

․ 당초 : 2019. 07. 29. ~ 2020. 02. 28.

․ 변경 : 2019. 07. 29. ~ 2020. 05. 31. (92일)

3		검토의견

❍ 상기와 같이 설계변경 및 준공기한 연기 처리코자 함

❍ 계약부서에 설계변경 시행 요청(→공원운영과)

붙임  1. 감리 검토의견서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 계약금액 검증확인서 1부.  끝.