문서번호	광화문광장추진단-13848
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	광장활성화팀장	광화문광장사업반장		광화문광장추진단장
조지웅	이형순	임창수		12/17 강옥현
협 조

설계변경 검토보고

(광화문일대 보행환경 개선사업 기본 및 실시설계)

2019. 12.

도 시 재 생 실

(광화문광장추진단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

설계변경(제1차) 검토 보고

광화문일대 보행환경 개선사업 기본 및 실시설계 -

「광화문일대 보행환경 개선사업 기본 및 실시설계 용역」추진 관련 과업내용 추가에 따른 설계변경(제1차)을 시행코자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 광화문일대 보행환경 개선사업 기본 및 실시설계

○ 용 역 사 : ㈜태조엔지니어링, ㈜동해엔지니어링

○ 용역기간 : ‘19.10. 3 ~ ’20. 6. 2(8개월)

○ 용 역 비 : 867,340,000원

구분	예산액	집행액(계약액)	집행잔액	비고
’19년도	1,000,000,000원	867,340,000원	133,660,000원

□ 설계변경 검토내용

○ 설계변경 사유

- 광화문광장추진단-12312(2019.11.05.)호 기록물 제작요청

· 새로운 광화문광장 1차 토론회 영상기록물(3종) 제작비

○ 용역비 변경

당 초	변 경	증 감	비고
867,340,000원	877,577,000원	증10,237,000원

※ 용역기간 변경 없음

□ 조치계획

○ 상기 보고와 같이 추가 과업지시에 대해 ’19년도 예산 집행잔액 활용 설계변경 시행코자 함.

붙임  1. 과업내용서(변경).

2. 변경설계내역서.

3. 방침서(1차토론회 결과보고).  끝.