문서번호	기전설비과-12294
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
임은비		조성태	12/17 代서한호
협 조
	기획예산과장			代이호성
	재무회계과장			김분숙
	주무관			김기봉

- 낙산배수지 감시제어시스템 제작구매 -

설계변경 및 심의 소위원회 개최 계획

2019. 12.

생   산   부

【기전설비과】

- 낙산배수지 감시제어시스템 제작구매 -

설계변경 및 심의 소위원회 개최 계획

낙산배수시 건설공사 전기공사에 수반되는 감시제어시스템 제작구매의 설계변경 검토결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ				관 련 근 거

❍ 설계변경 서류 제출 : 한국종합2019-12-627호

Ⅱ				사 업 개 요

❍ 건    명 : 낙산배수지 감시제어시스템 제작구매 설치

❍ 공사개요 : 배수지 증설공사(증2,300㎥)에 따른 부대 자동제어설비

❍ 시공업체 : 탑정보통신(주) 대표 오영권

❍ 감리회사 : 한국종합기술(책임건설사업관리기술자 최형출, 전기 전유택)

❍ 예산과목 : 관)자본적지출, 항)비가동설비자산취득, 세항)건설중인자산, 사업)낙산배수지 건설공사, 목)시설비및부대비, 세목)시설비

❍ 납품기간 및 계약금액

구 분	납품기한	계약금액
총차분	‘19.07.15.~’20.05.31.	209,390,000원

Ⅲ				설계변경 보고

❍ 설계변경 주요내용

변경내용	비 고
가. PLC 고장 시 CCTV로 수위를 확인할 수 있는 전광판 설치	관련문서 : 중부수도-27528호 (‘19.10.29)
나. 침입감시 장치 설치
다. 유지관리용 오뚜기 스위치 설치
라. 5항목 수질계측기 설치 및 알카리도계, pH계 및 수온계 삭제

※ 낙산배수지 건설공사(전기공사) 실정보고 검토(기전설비과-11336호 ‘19.11.20)

❍ 계약금액 증감 현황

변경내용	당 초	변 경	증 · 감	비 고
감시제어시스템 제작구매 설치	209,390,000	209,390,000	- (증감없음)	원단위 절삭

Ⅳ				소위원회 개최 (설계변경 사전심의)

❍ 개최근거 : 본부 계약심사과-227(‘19.01.20.)

❍ 일  시 : ‘19. 12. 17(화)

❍ 장  소 : 생산부 회의실

❍ 심사위원

- 팀장 : 기전설비과장

- 위원 : 총4명 (타부서 1/2지정)

· 기전설비과 주무관 김영준, 김인준

· 기술진단과 주무관 이민화, 채규성

❍ 주요 심의내용

- 신규공종 및 물량변경 적정 여부

- 보험료 정산 등 제경비 적정 여부

Ⅴ				행 정 사 항

❍ 상기 보고 내용과 같이 계약물량 변동사항을 설계변경 사전심의 소위원회 개최를 통해 검토 후,

❍ 재무회계과에 계약 변경요청하고 감리업체에 변경사항 통보.

붙임 1. (감리단)계약금액 조정요청 1부.

2. (방침서)실정보고 검토보고 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.