문서번호	기전설비과-12301
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김인준		조성태	12/17 代서한호
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

[구의정수센터 탈수설비 개량 자동제어공사]

설계변경 검토 보고

2019. 12.

생산부

(기전설비과)

구의정수센터 탈수설비 개량 자동제어공사

설계변경 검토 보고

물량변경과 제경비 정산에 따른 사항을 검토하고 그 결과를 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명: 구의정수센터 탈수설비 개량 자동제어공사

○ 공사기간: 2018. 9. 4. 〜 2019. 12. 20.

○ 계 약 자: 비케이전기통신(대표 유봉근)

○ 계약금액: 금105,278,700원

○ 공사내용: 탈수기 제어화면 및 자동제어프로그램 수정 등

□ 설계변경 검토내용

○ 설계변경 사유

- 보험료 등 납입증빙자료 미제출에 따른 감액

- 탈수기제어반과 1층 제어반 사이 통신선로 구축 관련 물량 감소

○ 설계변경 금액

[단위: 원]

구분	변경 전	변경 후	증·감	비고
직접공사비	92,542,005	88,313,363	감) 4,228,642
제경비 등	3,165,905	586,637	감) 2,579,268
부가세	9,570,790	8,890,000	감) 680,790
총공사비	105,278,700	97,790,000	감) 7,488,700

○ 수량 증감내용

	통신케이블 UTP CAT5e [단위: m]	강제전선관 아연도22mm [단위: m]	전선관 지지행거 22C [단위: 개소]
변경 전	452	79	51
변경 후	120	0	0

※ 기존 및 신규 케이블트레일을 활용하여 케이블을 포설함에 따라 강제전선관 등을 미설치함

□ 향후계획

○ 설계변경심의 소위원회 개최

○ 변경계약 체결 후 준공

붙임  변경내역서 1부.  끝.