＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독2처
제목	공사현장 실정보고(폐기물 수량 증가)에 대한 회신

1. 서울시설공단 공사감독2처-19615(2019.12.03.)호와 관련입니다.

2.『독산3동 991-18~독산2동 1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사』현장 실정보고(폐기물 수량 증가)에 대해 아래와 같이 검토 후 승인 통보하오니 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

구 분	서울시설공단	남부수도사업소
사토장 변경	○ 본 공사의 1구간(D800mm, L=386m)관부설 중 기존 아스팔트 포장 두께가 설계기준인 20cm 보다 약 10cm 증가된 30cm로 발생되어 약 92㎥의 아스팔트 폐기물이 증가된 실정으로, 당초 설계에는 기존 제수변실(구형)의 철거가 반영되지 않았으나 관부설 중 구형 제수변실이 5개소 발생됨에 따라 구형 제수변실 철거에 따른 콘크리트 폐기물 약 70㎥가 증가된 실정임. ○ 1구간 관부설 중 기존 설계기준 보다 아스팔트 두께가 증가한 부분에 대하여 정산 시 현장 여건을 고려하여 실제 발생한 두께(평균 약30cm)로 반영하여 적용하는 것이 타당할 것으로 판단되며, 기존 구형 제수변실 철거에 따른 무근 콘크리트 깨기 및 콘크리트 폐기물 운반 등을 정산 시 반영하고 구형 제수변실 체적만큼 터파기 수량에서 제외하는 것이 타당할 것으로 판단됨.	○ 당초 본 공사 내역서에 아스팔트포장깨기 물량은 표준설계기준에 따라 포장두께를 20cm 설정하여 산출하였으나, 공사1구간 실굴착 결과 아스팔트포장두께가 덧씌우기 등으로 인해 일정하지 않아, 평균 30cm로 확인되어, 아스팔트포장깨기 및 관련 공정 물량은 증하고, 해당 깨기물량만큼 터파기 및 잔토처리 물량은 감이 필요함. ○ 아울러, 공사시행중 발견한 기존 구형 제수변실에 대한 철거내역이 공사내역에 반영되지 않아, 설계변경시 기존내역에 해당 체적만큼 무근 콘크리트 깨기 및 관련 공정 물량을 반영하고, 터파기 및 잔토처리 물량은 제외가 필요함.

끝.

	남부수도사업소장
★주무관	유동훈		급수관리팀장	이일로		급수운영과장	전결 12/17 이성환
협조자
시행	급수운영과-23666	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4576	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(5)