투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	운영기획과장
(경유)
제목	설계변경 시행(목동빙상장 냉동기 및 부대설비 교체공사)

1. 목동사업과-11743(2019.12.11.)호 및 서울시설공단 감독3처-12957호(2019.12.16.)와 관련,『목동빙상장 냉동기 및 부대설비 교체공사』에 대해 다음과 같이 설계변경을 시행하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 개    요 -

가. 공 사 명 : 목동빙상장 냉동기 및 부대설비 교체공사

나. 도 급 자 : ㈜세항이엔지(대표 신항호)

다. 계약금액 : *************

라. 공사기간 : 2019.09.30.~ 12.23.

마. 공사감독 : 서울시설공단 ******

바. 실정보고 주요내용

[건축분야] : 목동사업과-11743호 실정보고

***************************

*******************************

[기계분야] : 서울시설공단 공사감독3처-12353호 실정보고

**************************************

***********************************

[제경비 정산] : 각종 보험료 및 산업안전관리비, 환경보전비 정산 – 세부 산출서 준공시 제출

사. 예산과목 : 노후체육시설개보수사업, 목동운동장․신월야구공원시설 개․보수(401-01), 목동빙상장 펜스 보호패드 설치공사

************

********

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

붙 임  1. 공사실정 보고서 및 시설관리공단 설계변경 요청공문 각 1부.

2. 설계변경 내역서(건축, 기계), 도면(별첨) 1부.

3. 제비율검증서 및 안전관리비검증서 각 1부.

4. 시공자 공문 및 설계변경 합의서 각 1부.  끝.

	서울특별시체육시설관리사업소장
주무관	강남규		목동사업과장	이종섭		체육시설관리사업소장	12/17 김정열
협조자	주무관	이동열		주무관	장서윤		주무관	송미자
운영기획과장	김남대
시행	목동사업과-11962	(		)	접수		(		)
우	07990	서울특별시 양천구 안양천로 939 (목동) 목동운동장 목동사업과	/
전화	02-2640-3841	/전송	02-2649-7145	/	kalisma001@seoul.go.kr	/	부분공개(5)