문서번호	행정지원과-27359
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장		서부수도사업소장
방만천	엄태현	代엄태현		12/17 박영헌
협 조
	주무관		김혜경

「서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」

2019년 회계연도 세출예산 이월 시행

2019. 12. 17.

서부수도사업소

【행정지원과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「서부수도사업소 비탈면(팔각정하부) 보수보강공사」

2019년 회계연도 세출예산 이월 시행

우리사업소에서 시행중인「서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」와 관련하여 본 공사에 대한 2019년 회계연도 세출예산 이월을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

○ 본부 기획예산과-14459(2019.12.10.)호

“2019년 회계연도 세출예산 이월 대상사업 제출 요청”

2		공사현황

○ 공 사 명 : 서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사

○ 공사개요 : L=22m, H=10.3m, 기대기식옹벽, 낙석방지망 등

○ 공사기간 : 2019. 10. 14.~12. 20.

○ 계약업체 : ***************

○ 도 급 비 : ************

○ 감 독 자 : 자체감독

3		이월사유

○ 사고이월 사유

- 9월발주 및 10월 계약되어 12월 준공예정임(1회 준공기한 연기)

- 공사중 추가공정 발생 및 공정변경에 따른 시공사와의 설계변경 협의 지연(시공사에서 설계변경관련 자료 미제출)

4		예산내역

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 집행내역　                                                   (단위 : 원)

예산액	배정액	지출원인행위액	지출액	사고이월액	불용액
***********	***********	***********	*	***********	*

5		조치의견

○ 상기와 같이 시공사와의 설계변경 협의 지연으로 공사완료가 불가하여 본 공사를 사고이월하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 예산이월 요구서 1부.

2. 사업별 명세서 1부.

3. 지출원인행위 미필 이월명세서 1부.