투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청 (보라매공원 외 2개소 노후포장 등 정비공사)

1.  시설과-3147호(2019.12.12.)와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 『보라매공원 외 2개소 노후포장 등 정비공사』의 준공기한이 연기됨에 따라 공사에 수반되는 관급자재의 납품기한을 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 건   명 : 보라매공원 외 2개소 노후포장 등 정비공사

○ 관급자재 납품기한 연기

물품식별번호	품명 및 규격	계약금액(원)	업체	당초납품기한
10063096	레미콘 (25-210-12)	8,906,980	㈜삼표산업	2019. 12. 18.
22371951	도로경계석 (150*150*100,직선)	1,277,100	예성석재	2019. 12. 21.
22494897	흙콘크리트 (t150mm, 일반습식)	45,576,000	㈜한솔이앤씨	2019. 12. 21.
22535429	아스팔트콘크리트 (WC-2, t13mm, 표층용)	3,158,870	서인아스콘(협)	2019. 12. 18.
22792182	탄성포장재 (t15mm, 5종 다목적용)	17,088,000	㈜한솔이앤씨	2019. 12. 21.

- 변경납품기한 : 2020. 3. 31 까지

○ 연기사유 : 본 공사 일정에 맞추어 납품기한 연기

○ 지체상금 부과여부 : 미부과(연기사유 귀책 : 서울특별시 동부공원녹지사업소)

붙임   준공기한 연기 검토보고 1부.  끝.

	시설과장
주무관	신상현		시설관리팀장	조민형		시설과장	12/17 代하종식
협조자
시행	시설과-3220	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	02-2181-1161	/전송	02-2181-1169	/	sshydp@seoul.go.kr	/	부분공개(5)