문서번호	기전과-7184
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이태근		代김해중	12/17 代송기영
협조

「2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)」

설계 변 경(제1차) 검 토 보 고

2019. 12.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』

설 계 변 경(제1차) 검 토 보 고

「2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사」와 관련하여 책임감리원으로부터 제출된 설계변경 보고에 대해 아래와 같이 검토 보고드림.

		사 업 개 요

〇 공 사 명 : 2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

〇 공사위치 : 남부도로사업소 관할지역(금천, 관악, 동작구, 서초, 영등포 등)

〇 공사내용 : 교통안전표지 설치 및 유지보수

〇 계약금액 : 금81,570,820원

〇 시 공 사 : ****************

〇 공사기간 : ‘19. 2.22. ~ 12. 27.

〇 감리업체 : ***************

		추 진 경 위

〇 ‘19.03.12 : 제1차 작업지시

〇     04.05 : 제1차 작업지시(추가1)

〇     05.13 : 제1차 작업지시(추가2)

〇     05.31 : 제1차 작업완료 보고

〇     06.10 : 제2차 작업지시

〇     07.11 : 제2차 작업지시(추가1)

〇     08.30 : 제2차 작업완료 보고

〇     10.11 : 제3차 작업지시

〇     11.18 : 제3차 작업지시(추가1)

〇     11.22 : 제3차 작업지시(추가2)

〇     12.17 : 제3차 작업완료 보고

		설계변경사항

〇 설계변경 사유 : 경찰청 규제사항 등 물량변경에 따른 수량 변경

〇 주요 설계변경 내용

호 표	품 명	단위	당초	변경	증·감	비고
1-5h	규격원형 600 - 신설	매	5	21	증16
2-10h	중형원형∅780 - 교체	매	3	45	증42
3-4h	대형안전표지판 교체	매	1	10	증9
4-1h	사각900*900 - 신설	매	1	4	증3
5-3h	고소용표지 - 신설	매	1	27	증26
9-1h	발광형표지판 - 신설	SET	1	14	증13

※ 물량 변경 세부내역 : 붙임 - “설계변경 내역서” 참조

〇 제경비 정산

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
직접재료비	7,889,255	8,705,677	증) 816,422
직접노무비	6,171,303	7,853,431	증) 1,682,128
간접노무비	2,037,584	2,249,532	증) 211,948
산재보험료, 고용보험료	841,250	928,756	증) 87,056
건강보험료, 연금보험료 퇴직공제부금, 노인요양보험료	1,474,301	0	감) 1,474,301
산업안전보건관리비, 환경보존비 등	1,582,645	0	감) 1,582,645
경비(기계, 기타)	5,822,591	6,243,259	증) 420,668
간접비(일반관리비, 이윤 등)	8,336,362	8,174,636	감) 161,726
합 계	74,155,291	74,155,291	0

※ 제경비검증확인서 : “따로붙임”

〇 설계변경금액 : 금액 변동 없음                 (단위 : 원)

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공 급 가 액	74,155,291	74,155,291	-
	부가가치세	7,415,529	7,415,529	-
	합 계	81,570,820	81,570,820	-

◼ 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통사업특별회계, 교통안전표지 설치 및 유지보수, 시설비

〇 책임감리원 기술검토 의견

◼ 현장여건에 따른 제1∼3차 작업 물량내역 조정 및 제정비 정산 등을 반영하여 설계변경을 실행하는 것이 타당하다 사료됨.

		보고자의견

〇 책임감리원이 설계변경 요청한 사항을 검토한 결과,

- 제1∼3차 작업물량 변경 및 제경비 정산 등으로 책임감리원의 설계변경 검토의견이 타당함으로 이를 반영하여 설계변경을 시행하고자 함.

〇 설계변경 후 준공(검사) 처리하여 해당사업을 완료하고자 함.

		행 정 사 항

〇  ‘19.12월 : 설계변경시행

〇      12월 : 준공

붙  임 : 1. 책임감리원 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제경비검증확인서 1부. 끝.