문서번호	시설관리과-31067
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
한호진		12/17 천성훈
협 조

설계변경 심의 위원회 개최결과 보고

(2019년 중랑, 동대문구 관내 시설물 2차)

2019. 12.

동 부 수 도 사 업 소

(시 설 관 리 과)

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 「2019년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」와 관련하여 계약물량 증감에 따른 설계변경 사유가 발생함에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

1. 설계변경 개요

○ 공 사 명 : 2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

○ 도 급 자 : 승효건설(주) 김성현

○ 공사개요

- 당  초 : 밸브 및 실정비 보수 157개소

소화전 보수 80개소

기어박스 점검 및 정비 5개소

- 변  경 : 밸브 및 실정비 보수 102개소

소화전 보수 110개소

기어박스 점검 및 정비 5개소

○ 계약기간 : 2019. 4. 26. ~ 2020. 4. 30.

○ 도 급 액 : 변동없음

구 분	금 액		증·감	비고
	당 초	변 경
도 급 비	614,499,400	614,499,400	-	신규공종 발생 및 물량 증·감
공급가액	558,635,819	558,635,819	-
부 가 세	55,863,581	55,863,581	-

○ 설계변경 내용

- 신규공종 : 콘크리트 포장절단(100~150, 야간) 등

- 물량감소 : 기계터파기(굴삭기 0.18㎥) 등

- 물량증가 : 환토소운반(2.5DT, 집하장→현장) 등

2. 심 의 개 최

○ 심의일시 : 2019년 12월 17일(화) 13:00

○ 심의장소 : 우리사업소 3층 회의실

○ 심의위원 : 위원장 시설관리과장

위  원 급수운영과(급수운영팀장 이상환, 급수관리팀장 권기섭)

시설관리과(시설운영팀장 박종일, 시설6급 유광창)

3. 심 의 내 용

○ 신규공종 및 계약물량 증감에 대한 설계변경 사항

가. 물량변동의 적정성 여부

나. 관련규정 및 적법성 여부

다. 설계변경 세부내용 및 사유 등

4. 심 의 결 과

○ 물량변동의 적정성 여부 : 적 정

○ 관련규정 및 적법성 여부 : 적 정

○ 설계변경 세부내용 및 사유 : 적 정

붙임  가. 심의 의견서 1부.

나. 설계변경 사유서 및 변경내역서 각 1부.  끝.