문서번호	급수운영과-23708
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	급수관리팀장	급수운영과장
유동훈	이일로	12/17 이성환
협 조

설계변경 검토보고 (제1회, 정산)

(독산3동991-18~독산2동1038-1번지 노후 송배수관 정비공사)

2019. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 검토보고 (제1회, 정산)

(독산3동991-18~독산2동1038-1번지 노후 송배수관 정비공사)

「독산3동991-18~독산2동1038-1번지 노후 송배수관 정비공사」 업무수행 중 현장 시공여건 변화에 따른 신규공종 및 물량 증 ․ 감이 발생됨에 따라 설계변경(제1회, 정산)을 시행하여 공사업무에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 독산3동991-18~독산2동1038-1번지 노후 송배수관 정비공사

○ 공사개요 : D=700~800mm, L=1,061m

○ 계약기간 : 2019. 5. 14. ~ 2020. 1. 8.

○ 계약금액 : 금1,513,867,900원

○ 계약상대자 : 성산건설(주)[공동도급 : 동신공영(주)]

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

□ 설계변경 사유

○ 공사 시행중 현장 시공여건 변화에 따른 계약물량 변동(증·감) 및 신규공종 발생

- 물량증가 : 「아스팔트 포장절단」 외 72개 공종

- 물량감소 : 「잔토처리(0.7상차비별도)」 외 48개 공종

- 신규공종 : 「구조물깨기(무근, 기계)」 외 32개 공종

□ 설계변경 현황

○ 계약금액 변경 – 증)38,782,100원

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	1,376,243,546	1,411,500,000	35,256,454
부가가치세	137,624,354	141,150,000	3,525,646
도 급 비	1,513,867,900	1,552,650,000	38,782,100

○ 공사개요 변경 - 변동없음

구 분	당 초	변 경
공사개요	D=700~800㎜, L=1,061m	D=700~800㎜, L=1,061m

○ 주요 신규공종 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
구조물깨기(무근), 기계	굴삭기0.6㎥(브레이카),야간	㎥	-	70	2,193,310
기존관 폐쇄	충진 20kg/㎤,야간	㎥	-	99	19,801,584
강판수동절단	1500mm (t=9mm)(야간)	m	-	624	1,905,696
침하방지용 관받침설치	12*15*120cm 기성품	개소	-	326	30,738,540
강관접합(기계,외부)	1500mm(야간)	개소	-	2	471,518
1악용접(부단수용)	1200/80	개소	-	1	1,344,547
원형밸브실 설치공(기초CON)	D=80mm(야간)	개소	-	1	642,195
원형밸브실 설치공(기초CON)	D=200mm(야간)	개소	-	1	635,259
철개교체공	원형(야간)	개소	-	1	324,353
작업구 설치,철거	원형(야간)	개소	-	7	6,693,834

○ 주요 물량 증 ․ 감 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
잔토소운반(0.6터파기동시상차)	24DT,(현장->집하장3km),야간	㎥	5,192	7,252	13,142,800
주철(이형관) 부설공	700mm(야간)	개소	142	79	-15,141,105
K.P 이탈방지압륜 접합	700mm(야간)	개소	210	108	-25,314,054
주철관 절단공(절단기사용)	700mm(야간)	개소	71	33	-4,553,768
기계다짐(보통)	(램머80kg),(야간+4차선지세)	㎥	789	1,220	5,055,630

□ 조치계획

○ 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하여

심의 결과에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임  1. 설계변경내역서 및 제비율 검증 1부.

2. 설계변경 사전심의 요청서 1부.  끝.