문서번호	기전과-6371
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
황상호		문준호	12/17 代문준호
협조
	주무관		박건우

『자동염수살포장치 선로정비공사(동부간선 달팽이램프, 성수대교 북단램프)』

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

성동도로사업소

(기전과)

『자동염수살포장치 선로정비공사

(동부간선 달팽이램프, 성수대교 북단램프)』

설계변경 검토보고

『자동염수살포장치 선로정비공사(동부간선 달팽이램프, 성수대교 북단램프) 』와 관련하여 시공업체로부터 정산사항(기계경비 감액)이 있어, 검토 후 계약업체와 계약변경코자 보고드림.

❏ 관련근거

❍“자동염수살포장치 선로정비공사(동부간선 달팽이램프, 성수대교 북단램프)”설계변경(정산) 제출의 건 - CD1912-006(2019-12-17)

❏ 계약현황

❍ 계 약 명 : 자동염수살포장치 선로정비공사(동부간선 달팽이램프, 성수대교                          북단램프)

❍ 계 약 자 : ***************

❍ 계약금액 : ****************************

❍ 계약기간 : 2019. 12. 04 ~ 2019.12.18

❏ 계약변경

❍ 변경사유 : 기계경비 단가기입 오류로 인한 감액정산

❍ 기계경비 정산

구 분	연번	품 목	금 액		비 고 (증⸳감)
			당 초	변 경
기계경비정산	1	기계경비	305,491	0	감) 305,491
	소 계		305,491	0

❍ 변경금액

구 분	당 초	변 경	증⸳감
공 급 가 액	27,252,000	26,946,455	감 305,545
부가 가치세	2,725,200	2,694,645	감 30,555
도 급 금 액	29,977,200	29,641,100	감 336,100

❏ 예산과목

❍ 도로관리과, 도로 및 도로부속물유지관리, 제설대책추진, 시설비 및 부대비, 시설비

❏ 보고자 의견 및 향후계획

❍ 공사 현장 검수결과 공사 전반에 걸쳐 작업지시내용, 기타 약정대로 준공되어 위의 변경내역과 같이 기계경비를 감액정산하고 별첨 설계변경 내역서와 같이, 계약변경 하여 준공 처리코자 합니다.

첨부 : 1. 설계변경 요청서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.