문서번호	기전과-7183
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이태근		代김해중	12/17 代송기영
협조

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』

제3차 작업지시 완료 및 실정보고

2019. 12.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가) 』

제3차 작업완료 및 공사실정보고

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』제3차 작업지시에 대한 공사실정 보고에 대한 그 결과를 보고드림

		관련근거

□ 3차 작업지시

○ 3차 작업지시 : 기전과5825(2019.10.11)

○ 3차 작업지시(추가1) : 기전과6326(2019.11.08)

○ 3차 작업지시(추가2) : 기전과6590(2019.11.22)

□ 3차 작업완료 실정 보고

○ 감리업체 : 한국검정㈜, 한검 제 19324(2019.12.17)호

		공사개요

□ 공 사 명 : 2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

□ 공사위치 : 남부도로사업소 관할지역(금천, 관악, 동작구, 서초, 영등포 등)

□ 공사내용 : 교통안전표지 설치 및 유지보수

□ 계약금액 : 금81,570천원

□ 시 공 사 : ****************

□ 감 리 사 : ***************

		3차 작업지시

□ 제3차 작업지시 내용 : 총 155건

○ 작업기간 : 2019. 10. 14. ~ 12. 17.(지연일수 17일, 완료예정일 11.29)

○ 규    제 :  35건 - 동작구 장승배기로 14 유턴, 횡단보도표지 신설 등

○ 긴급보수 :    9건 - 동작대교 북단 복주식 도로표지교체 등

○ 일상보수 : 111건 - 서초구 남부순환로 서초IC 좌회전금지표지교체 등

		작업완료 및 실정보고

□ 제3차 작업결과 : 총 155건(완료 78건, 미완료 77건)

○ 주요작업완료내역(세부사항 “별첨”)

지시 번호	위 치	지시내용	작업 결과	비고
3-14	동작구 대림사거리	#412 (신호준수, 사각900*900) 신설 2개소	완료
3-15	관악구 당곡교차로	#313(우측면통행,원형780)신설2개소 #장애물표지신설3개소 #314(좌측면통행,원형780)신설 #407(신호시,사각780*280)신설 #212(직진금지)이설	완료
3-16	금천구 말미사거리	#216(유턴금지,원형900)신설2개소 #316(우회로,원형900)신설2개소 #407(직진후좌회전,사각900*300)신설2개소 #401(전방180m,사각900*450)신설2개소	완료
3-17	동작구 상도동 국민은행교차로	#224(속도제한50,원형780)신설4개소 #427(속도해제30,사각900*900)신설 #313(우측면통행,원형780)신설 #장애물표지신설 #322(횡단보도,발광형표지)신설4개소	완료
3-18	서초구 교육개발원 입구	#228(양보,역삼각800)신설 #132,415(횡단보도,우회전시,사각1000*1700)신설 #316(우회로,원형900)신설 #415(200m앞,사각900*450)신설 #415(좌화전후적신호,사각900*450)철거 #322(횡단보도,발광형표지)신설3개소	완료
3-19	서초구 고속터미널교차로	#228(양보,역삼각800)신설 #308(직진및우회전원형780)신설 #장애물표지신설	완료
3-20	관악구 서울미술고교 앞	#311(유턴원형780)신설2개소 #보조표지(신호시,사각780*280)신설2개소 #장애물표지신설2개소 #214,311,107(좌회전금지,유턴,우합류도로)이설 #226(서행,역삼각800)신설 #313(우측면통행,원형780)신설 #장애물표지신설	완료

○ 주요작업미완료내역(세부사항 “별첨”)

지시번호	위 치	지시내용	미완료 사유
3-1	동작구장승배기로14앞 (신상도초교후문앞) (신+표)	#216(유턴금지,90)신설 #322(횡단보도,60,72)신설	신호등 미설치
3-5	서초구방배동방배로47 (누리시아웨딩홀앞)	#214(좌회전금지) 신설	노면 미설치
3-10	동작구 현충로210 앞 (국립현충원 교차로)	#322(횡단보도,오각600)신설 2개소	노면 미설치
3-13	서초구 반포동 신반포로 16길 잠원초교사거리	#329(비보호좌회전, 사각780*1170) 철거 2개소	노면 미설치
3-23	관악구 충무교	#218(주정차금지,원형600)신설 #428(견인지역,사각600*550)신설 #329(비보호좌회전)이설 #213(우회전금지,원형780)신설 #413(진입금지,사각780*280)신설 #212(직진금지,원형600)신설 #장애물표지신설	노면 미설치
3-1-1	관악구 낙성대로 23 앞	#322(횡단보도)표지 신설	신호등 미설치
3-24외 70 개소	동작구 노량진 삼거리 외 70개소	#315 (진행방향별표지,대형) 이설 등	작업 보류

□ 예산집행 금액 검토

(단위 : 원)

구 분		계약금액	전차수까지 누계(실적)금액	3차작업지시 금액	계약잔액
총공사비		81,570,820	25,110000	56,460,820	0
도급비	공 급 가 액	74,155,291	22,827,274	51,328,017	0
	부가가치세	7,415,529	2,282,726	5,132,803	0
	계	81,570,820	25,110,000	56,460,820	0

□ 책임감리원 검토의견

○ 금회 3차작업 대상 155건중 78건을 완료하였으며 미완료된 77건에 대하여는 노면선행 공사가 완료 후 작업지시 보류건과 차기년도에 별도 시행함이 타당함.

		보고자의견

□ 책임감리원 실정보고 검토 결과,

○ 금회 3차작업 대상 155건 중 78건을 완료하였고 미완료 77건은 작업여건이 되는 내년도에 공사시행하는 것이 타당하다고 사료됨

○ 따라서 책임감리원 실정보고는 적정함으로 실정보고에 대해 승인통보하고자 함.

○ 또한 지연배상금은 완료일 익일(11.30.)부터 작업이 완료일(12.17)까지 17일이지연되어 지연배상금률에 의거 479,920원을 부과하여 준공 시 정산처리코자 함

479,920 = 3차작업지시금액(56,460,820원) × 지연배상금률(0.5/1000) × 지연일 수(17일)

□ 금년도 작업지시 분에 대해 계약물량변경에 따른 설계변경후 준공처리코자 함.

붙  임 : 책임감리원 검토 보고서 1부.  끝.