문서번호	급수운영과-23740
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
김태승	이일로	이성환		12/17 代김지형
협 조	행정지원과장		김지형
	주무관		박현주

2019 회계연도 사고이월 보고

(시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사)

2019. 12. 17.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019 회계연도 사고이월 보고

(시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사)

우리 사업소에서 시행 중인 『시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사』관련 사고이월 사유가 발생되어 보고드림.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요 : D=80~300㎜ L=1,609m

○ 공사기간 : 2019.9.18. ~ 2020.5.6.

○ 도 급 사 : ***************

○ 총사업비 : **************

- 도 급 비: ************

- 이전비 및 기타: ************

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비

□ 사고이월 내역

**********************

*************************

***************************

***********************

***************************************************************

****************************

□ 사고이월 사유

○ 경찰서 도로공사 허가에 따른 작업대기: 14일

○ 관리청 포장 불가에 따른 작업대기: 13일

○ 대학수학능력시험에 따른 작업대기: 1일

○ 동절기 굴착통제에 따른 작업대기: 39일

○ 시흥대로 내 하수박스, 통신관 등 지장물 등으로 공기부족

┏당초 : 2019.9.18. ~ 2020.1.4.

┗변경 : 2019.9.18. ~ 2020.5.6.

□ 조치 계획

○ 위 내용과 같이 사고이월하여 공사시행 및 공정관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1) 준공기한 연기보고 1부.

2) 준공기한 연기원 1부.(공단)

3) 사고이월 사업별 명세서 2부.

4) 회계연도 사고이월 명세표 1부.  끝.