문서번호	토목과-15744
결재일자	2019.12.17.
공개여부	비공개
방침번호

지방시설주사		굴착복구팀장		토목과장		안전건설교통국장
김남천		권기철		오석관		12/17 손경철
협조
	재무과장		홍명안
	계약팀장		양영종

★ ◉

『2019년 도로굴착복구공사(단가계약)』

설계변경(제3회-최종) 시행 보고

2019. 12.

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [√] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

『2019년 도로굴착복구공사(단가계약)』

설계변경(제3회-최종) 시행 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2019년 도로굴착복구공사(단가계약)

○ 위    치: 성동구 전지역

○ 기    간: 2019. 3. 20. ~ 2019. 12. 31.

○ 규    모: 도로굴착복구 허가된 도로복구 및 정비

- 아스팔트 포장 A=74a→105.45a, - 보도 포장 A=1.45a→2.64a

- 경계석 및 경계블록 설치 L=36m→36m,

○ 사 업 비: 금454,367천원

(도급비 304,367천원, 관급비 126,474천원, 이전비 23,526천원)

○ 시 공 사: ㈜크로스텍엔지니어링  대표 박순국

□ 설계변경 사유

○ 2019년 도로굴착복구공사 작업지시(제8차) 완료 정산

○ 낙찰차액 사용계획 보고(토목과-14999, 2019.12.4.)

○ 건설공사 예정가격(운반비) 산정 개선사항 반영(감사담당관-1461호,2019.2.20.)

○ 현장 여건에 따른 공종별 물량 증·감(최종분)

○ 아스팔트콘크리트, 레미콘 등 관급자재 정산반영(관급자재비)

○ 건설폐기물처리비 정산반영(이전비)

○ 주요 공사비 증·감 현황

연번	구 분	물량증감 내역	공사비(천원)	비고
	합 계		증 43,230천원
1	작업지시 통신복구완료 제8차분(통신732m등 12건)	·토공(증699㎥),운반(증731㎥) ·아스콘 포장공(증31.45a) ·콘크리트 포장공(증0.13a) ·보도블록 포장공(증1.19a)	증 75,582천원
2	운반비 산정 개선사항 적용	·잔토처리, 폐기물 재료비,노무비,경비→경비로	감 2,958천원

연번	구 분	물량증감 내역	공사비(천원)	비고
3	관급자재 전체물량변경	·아스팔트콘크리트 1,700→1,401톤(감299톤) ·레미콘50→10㎥(감40㎥) ·미끄럼포장재290→90㎥(감90㎡) ·도장형바닥재 0→6㎥(증6㎡)	감 26,084천원
4	건설폐기물운반및처리비	·운반 278→280㎥(증2㎥) ·처리 642→656톤(증14톤)	증 694천원
5	기타이전비	·지적도근접 복구비등 감액	감 4,004천원

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사유로 공종별 변경된 사항에 대하여 첨부된 변경내역서와 같이 설계변경 및 정산 처리코자 함

○ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
총공사비	454,367,400	497,597,510	증 43,230,110
도 급 비	304,367,400	376,992,000	증 72,624,600
관 급 비	126,474,000	100,389,520	감 26,084,480
이 전 비	23,526,000	20,215,990	감 3,310,010

※낙찰차액: 45,632,600원

붙임  1. 설계변경설계서(제3회-최종) 1부.
2. 계약금액조정 검증확인서 1부.
3. 낙찰차액 사용계획 1부.

4. 건설공사 예정가격(운반비) 산정 개선사항 1부.

5. 일상감사결과 1부.  끝.