투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	「개포로 녹지연결로 조성공사 」설계변경 시행 및 계약변경 의뢰

1. 시설과-000호(2019.12.17.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인『개포로 녹지연결로 조성공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다. .

가. 공 사 명 : 개포로 녹지연결로 조성공사

나. 도 급 액 : *******************************

*************************************

***********

*****************************

*******************************

*****************************

마. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
* * *	****	*************	*************	*************
	***	***********	***********	************
	****	*************	*************	***********

바. 예산과목 : 동부공원녹지사업소 시설과, 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호, 생태계 복원사업, 단절된 녹지축 연결, 시설비 및 부대비, 시설비(예산편성부서 : 푸른도시국 자연생태과)

사. 기간연장

-*********************************

*************************************

- 사유 : 동절기 공사품질 저하 및 공사물량 증가에 따른 추가 작업일수 소요

붙임    1. 설계 변경 검토 보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	신상현		시설관리팀장	조민형		시설과장	12/17 代하종식
협조자	재무팀장	곽선아
시행	시설과-3218	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	02-2181-1161	/전송	02-2181-1169	/	sshydp@seoul.go.kr	/	부분공개(5)