문서번호	토목부-23578
결재일자	2019.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
김종혁	김동현	12/17 김용제

- 태릉~구리IC간 광역도로 확장공사 기본 및 실시설계용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2019. 12.

도시기반시설본부

토목부

- 태릉~구리IC간 광역도로 확장공사 기본 및 실시설계용역 -

준공기한 연기 검토 보고

『태릉~구리IC간 광역도로 확장공사 기본 및 실시설계용역』용역자가 제출한 준공기한 연장 요청에 대하여 검토 보고 드림.

※ 대ᄒᆞᆫ(도로) 제2019112호(2019. 12. 16., 준공기한 연장 요청)

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 태릉~구리IC간 광역도로 확장공사 기본 및 실시설계용역

❍ 규    모

- 도로확장 서울시(6차로→8차로), 구리시(4차로→6차로)

도로연장 : 2.91㎞ (서울시 1.28㎞, 구리시 1.63㎞)

- 본선교량 확장(2개소/40m), 신내IC 연결로 신설(3개소, 640m)

❍ 용역기간 : '16.11.14. ~'19.12.31.(2차분, '17.7.1.~'19.12.31.)

❍ 도 급 비 : 2,706백만원

❍ 용 역 자 : ㈜유신외 4개사

□ 준공기한 연장

❍ 준공기한 연기 : 365일

- 용역기간(총괄) : 당초  '16.11.14.~'19.12.31.⇒ 변경 '16.11.14.~'20.12.31.

- 용역기간(2차) : 당초  '17.7.1.~'19.12.31.⇒ 변경 '17.7.1.~'20.12.31.

❍ 지체상금 : 미부과

❍ 귀책부서 : 서울특별시

❍ 연기사유 : 설계용역이 서울시 구간은 마무리 되었으나 구리시 구간의 기본설계에 따른 기획재정부 한국개발연구원(KDI)의 타당성재조사가 진행중으로 타당성재조사 마무리 전까지 기본 및 실시설계용역의 준공기한을 연기하고자 함

※ ’19.10.16. : 총사업비 조정결과 및 타당성재조사 시행 통보 알림(국토교통부→도로계획과)

□ 조치의견 : '20.12. 31.까지 준공기한을 연기토록 도로계획과로 계약변경 요청.

붙임 : 계약기간 연장 요청 공문 및 합의 각서 1부. 끝.