문서번호	거점성장추진단-7129
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	산업거점개발팀장	산업거점활성화반장
최소영	송홍규	12/17 정덕영

-「G밸리 개발계획(변경) 및 실시계획 수립관련 -

소규모 환경영향평가 용역 계약변경 및 준공계획

2019. 12.

경제정책실

(거점성장추진단)

- G밸리 개발계획(변경) 및 실시계획 수립에 따른 -

소규모 환경영향평가 용역 계약변경 및 준공계획

「G밸리 개발계획(변경) 및 실시계획 수립용역」준공지연에 따른 소규모 환경영향평가 용역 계약 변경 및 부분 준공을 통해 ’20년도 본 과업을 차질 없이 지속 추진코자 함

□ 용역개요

**************************************************

*******************************

***********************************

*

***************************************

***************************************************************************************************

□ 추진현황

○ ’17. 8.   : 소규모 환경영향평가 수립 용역 추진 계획 수립

○ ’17. 8.   : 기술용역 타당성 심사

○ ’17. 8.   : 소규모 환경영향평가 용역 발주

○ ’17. 9.   : 용역 계약 및 착수

○ ’17. 9.~ : 현황 조사 등 기초 조사

○ ’18.12.   : 용역 기간 1차 연장 (당초)’18.12.28.→ (변경)’19.10.31.

○ ’19. 8.    : 용역 기간 2차 연장 (당초)’19.10.31.→ (변경)’19.12.22.

□ 계약변경 내용

***********************************

********************************************************************************

□ 계약변경 사유

*****************************************************************************************************************

*********************************

*********************************************************

************************************************

****************************************

□ 향후계획

○ ’19.12월     : 계약 변경의뢰 (→재무과)

○ ’20. 상반기  : 추경 일정에 따른 예산 편성 및 용역 재 발주

※ 별  첨 : 1. 합의각서 1부. 끝.