문서번호	도로보수과-12784
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		강종훈	12/17 이학구
협 조
	주무관			이상하

『‘19/’20 제설작업 용역(장기계속)』

설계변경(1회) 검토보고

2019. 12.

서부도로사업소

(도로보수과)

『‘19/’20 제설작업 용역(장기계속)』

설계변경(1회) 검토보고

우리사업소에서 시행하는 『‘19/’20 제설작업 용역(장기계속)』과 관련하여 1차분 비상 실근무에 따른 설계변경을 검토하고 결과를 보고함

□ 추진근거

○ 제설대책 추진에 따른 예산 재배정(민간용역비, 급량비)

- 도로관리과-1880(‘19.01.31.)호

○ 제설대책 추진을 위한 예산 재배정(사무관리비, 시설비)

- 도로관리과-18643(‘19.11.27.)호

□ 용역개요

○ 용 역 명 : ‘19/’20 제설작업 용역(장기계속)_서부

○ 용역기간 : 2019.11.11. ~ 2020.03.31.

- 1차분 : 2019.11.11. ~ 12.31.

○ 용 역 사 : **************

○ 용 역 비 : ****************************

□ 설계변경 검토 보고

○ ‘19/’20 제설작업 용역(장기계속) 예산집행 현황(예산배정액 : 370,000천원)

(단위 : 천원)

용 역 명	지출품의액	원인행위액 (도급비)	낙찰차액	비고
******************** ****	*******	*******	******

○ 설계변경 내역

- 주요공정 및 수량 변경 내역

공종	규격	단위	변경내역				비고
			당초	변경	증ㆍ감
상황반장	주간	hr	32	50	증	18
	야간	hr	19	31	증	12
상황대기원	야간	일	43	28	감	15
제설작업원	주간	hr	80	74	감	6
	야간	hr	44	62	증	18
제설작업운전원	주간	hr	111	225	증	114
	야간	hr	78	147	증	69
제설장비 상시대기	굴삭기 (0.6[eqn: m ^{3}])	hr	376	232	감	144
제설작업	굴삭기 (0.6[eqn: m ^{3}])	hr	18	10	감	8
덤프트럭(월임대)유류비		hr	91	67	감	24
덤프트럭 월임대	15톤 덤프	월	1.4	1.7	증	0.3

- 설계변경 금액

(단위 : 천원)

공 사 명	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
*****	***********	***********	*
*****	***********	***********	************
*****	***********	***********	************

○ 설계변경 사유

- 비상 실근무 반영에 따른 1차분 물량 증ㆍ감

‣ 제설용역 1차분 비상 실근무 ‘19.12.13.(금)까지 반영

- 제설용역 예산 추가 재배정에 따른 비상근무 계약내역 2차분을 1차분에 반영

‣ 제설용역 덤프트럭 월임대 1.4월 ⇒ 1.7월까지 반영

□ 조치계획

○ 비상 실근무 반영에 따른 물량 증ㆍ감분에 대한 1차분 도급비 증가액은 금회(’19.11.20.)재배정 예산(10,000천원) 및 낙찰차액(15,663천원) 중 금 23,250천원 을 사용하여 설계변경 시행하고 제설대책 추진에 만전을 기하고자함.

○ 기상에 따른 비상근무는 예측이 곤란하여 ‘19.12.14.(토)부터 발생하는 제설작업 용역비는 2020년도 2차분에 포함하여 정산조치 하고자 함.

붙임 1. 관련공문 2부.

2. 설계변경 내역서 2부(총차분, 1차분).  끝.