＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행[중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역-1차 최종]

우리 본부에서 시행중인 「중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역(장기계속단가계약)」에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

1. 용 역 명 :  중부,서부수도사업소 관내 상수도공사 건설사업관리용역

2. 용역개요

가. 급수공사 분야(급수공사, 불용관, 보호통교체, 포장 등) : 10,526건

나. 누수복구 분야(누수복구, 포장, 동결관 정비 등) : 12,706건

다. 시설물 분야(노후밸브 교체,배수지 항청소,시설물 보수 등) : 4,038건

3. 용역기간 : ‘19. 06. 22. ~ ‘21. 06. 21.(금회 : ‘19. 06. 22. ~ ‘19. 12. 31.)

4. 계약금액 : **************************************

5. 계 약 자 : ********************

6. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증,감	비 고
총부기 금액	*************	*************	*************
1차 금액	***********	***********	*************
2차 금액	*************	*************	*
3차 금액	***********	***********	*************

7. 변경사유

- 「녹에 취약한 노후 상수도관 추가 정비계획」에 의거 노후 상수도관 정비에 따른 상주기술인 추가 배치에 따른 물량 증가

- 1차분 휴일 근무일 감소 등에 따른 차수별 물량 증감 조정

8. 예산과목(1차분)

가. 상수도사업비, 영업비용, 배수공사비(급수공사비), 신설공사비

- 당초 362,626,000원 → 변경 331,563,100원(감 31,062,900)

나. 상수도사업비, 영업비용, 배급수비(상수도관누수복구), 수선유지교체비(감리비)

- 당초 388,443,000원 → 변경 338,495,300원(감 49,947,700원)

다. 자본적지출, 유형자산취득, 구축물(노후밸브정비), 시설비및부대비(감리비)

- 당초 168,861,000원 → 변경 180,624,400원(증 11,763,400원)

라. 자본적지출, 유형자산취득, 구축물(노후상수도관(배급수관)정비), 시설비및부대비(감리비)

- 당초 0원 → 변경 98,522,600원(증 98,522,600원)

붙 임 :  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(1차-최종) 1부.

3. 설계변경 심사결과 1부.

4. 건설사업관리기술인 추가 배치계획 1부.

5. 녹에 취약한 노후 상수도관 정비계획 1부.  끝.

주무관	이준상		시설관리과장	代장석춘		시설안전부장	신용철		상수도사업본부부본부장	12/17 배광환
협조자	주무관	김윤환		주무관	오혁준		누수방지과장	이용구
급수설비과장	代이재학
시행	시설관리과-12384	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)