문서번호	시설관리과-26429
결재일자	2019.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
김용준	권승계	고신석	12/18 박영준
협 조
	행정지원과장		代신민철
	주무관		박현주

2019년 회계연도 사고이월 보고

『대방동 407-25~407-29번지 외 10개소 배급수관 정비공사』

2019.12.

남부수도사업소

(시설관리과)

2019년 회계연도 사고이월 보고

『대방동 407-25~407-29번지 외 10개소 배급수관 정비공사』

우리 사업소에서 시행 중인 『대방동 407-25〜407-29번지 외 10개소 배급수관 정비공사』와 관련, 사고이월 사유가 발생되어 이를 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 대방동 407-25〜407-29번지 외 10개소 배급수관 정비공사

□ 공사규모 : 배급수관 정비 D100〜300mm, L=2,645m

□ 공사기간 : 2019.9.18. 〜 2020.6.17.

□ 계약업체 : ㈜맥경건설, 대표 설희수

□ 총사업비 : 2,062,700,000원

○ 도   급  비 :   907,915,800원

○ 이전비및기타 : 1,016,000,000원

※ 낙 찰 차 액 :   138,784,200원

Ⅱ		예산집행 내역

□ 예산 과목

○ 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비(시설비)

□ 집행 내역

						(단위 : 원)
예산액	예산현액(A)	배정액(B)	원인행위액(C)	지출액(D)	집행잔액(E)	사고이월액 (A-D-E)
2,062,700,000	2,062,700,000	-	1,321,225,650	757,915,180	138,784,200	1,166,000,620

※ 집행잔액 : 낙찰차액(138,784,200원)

Ⅲ		사고이월 사유

○ 당초 2019.9.6. 계약을 체결하여 준공일 2020.6.17.로 계약된 공사로 총 2,645m 관로 부설에 대한 절대공기가 부족하며,

○ 현재 도로굴착통제(’19.11.20.〜’20.2.28.)로 인해 공사가 중지되어 있어 이에 따른 사고이월이 필요함.

Ⅳ		조치 의견

○ 상기 보고 내용과 같이 금년도에 공사 준공이 불가하므로 사고이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 사고이월 사업별 명세서 각 1부.

2. 회계연도 사고이월 요구서 1부.  끝.