문서번호	총무과-13806
결재일자	2019.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
김종민		代고은미	12/18 김윤규
협조	주무관		신현성
	주무관		김현

- 난지창작스튜디오 태양광 발전설비 설치 -

실정 보고에 따른 설계변경(2차) 검토 보고

2019. 12.

서울시립미술관

(총무과)

- 난지창작스튜디오 태양광 발전설비 설치 -

실정 보고에 따른 설계변경(2차) 검토 보고

난지창작스튜디오 태양광 발전설비 설치공사 중 시공업체의 실정보고에 대해 검토하고, 설계변경을 추진하여 공사에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

◯ 난지창작스튜디오 제로에너지건물(ZEB) 추진계획(총무과-7916, 2019.7.18.)

◯ 난지창작스튜디오 태양광 발전설비 설치계획(총무과-8084,2019.7.23.)

◯ 난지창작스튜디오 태양광 발전설비 설치 변경계획(총무과-10944,2019.10.7.)

□ 공사개요

연 번	구 분	내 용	비 고
1	장 소	난지창작스튜디오
2	태양광발전 설치용량	60kW	스튜디오 A, 전시장 상부 등
3	소요예산	약 194,000천원
4	감리업체	㈜ 하이텍엔지니어링
5	조달업체(관급)	㈜ 풍성인더스	태양광 발전설비 조달구매
6	공사업체	㈜ 신안전력

- 태양광 발전 정격용량 : 130㎾= 60㎾ + 70㎾(기 설치)

Ⅱ		실정보고

□ 보고경위

◯ 2019.12.17. : 실정보고(공사업체 → 감리업체)

◯ 2019.12.17. : 실정보고에 대한 감리의견서 제출(감리업체 → 미술관)

□ 실정보고(공사업체)

◯ 변경내용

구 분	변경 사유
*******	********************************************* ************************************
***********	*******************
******************	***********************

□ 검토의견(감리업체)

◯ 시공자의 실정보고에 대하여 검토한 결과 타당하다고 판단

⇒ 설계변경 필요

Ⅲ		처리계획(설계변경)

□ 검토 및 처리의견(미술관)

◯ 시공업체의 실정보고와 감리업체의 검토의견이 적정한 것으로 판단

◯ 실정보고를 승인하고 설계변경 처리

□ 설계변경

구 분	변경 전	변경 후	증감액
*****	********	**************	*********
***		*******
********	*********	*****
제**			***************

※ 계약금액 : 변경 없음

Ⅳ		행정사항

◯ 설계변경에 따른 변경계약 체결

붙 임 : 시공업체 공문, 실정보고서, 감리원 검토의견서, 감리업체 공문 각 1부.  끝.