문서번호	시설관리과-24928
결재일자	2019.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
박성자	이연창	代이연창	12/18 배현숙
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!’

「2019년 강서구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역」

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

2019. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

「2019년 강서구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역」

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

『2019년 강서구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역』에 대한 설계변경 심의위원회를 개최하고 결과를 보고 드림

□ 설계변경 개요

○ 용 역 명: 2019년 강서구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역

○ 용역기간: 2019. 4. 23. ~ 2019. 12. 20.

○ 계 약 자: ㈜건양엔지니어링 대표 이승헌 외 1개사(수자원기술(주) 대표 김진원)

○ 설계변경 내역

(단위: 개소, 원)

구분	상수도맨홀 정밀점검		비고
	당초	변경
용역개요	*****	*****	******
용 역 비	***********	***********	************

□ 심의위원회 개최

○ 심의일시: 2019.12.18.(수) 10시

○ 심의장소: 시설관리과 사무실

○ 심의내용: 물량 증 · 감에 따른 설계변경의 타당성 검토

○ 심의위원

- 위원장: 시설관리과장

- 위  원

· 급수운영과 시설6급 문병희, 주은선, 강병국

· 시설관리과 시설6급 김남구

- 간 사: 시설안전팀장 이연창

□ 설계변경 심의위원회 검토 결과

○ 신규공종 및 계약변동(증․감)물량 계약단가 적정 적용여부: 적정

○ 설계변경 세부내용 및 사유 등 타당성 여부: 타당함

○ 관련규정 및 적법성 여부: 적정

□ 행정사항

○ 설계변경 시행 후 우리사업소 행정지원과에 설계변경 계약 의뢰

붙임  1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.