문서번호	시설보수과-7045
결재일자	2019.12.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김민호		임준빈	12/18 이성재
협조
	주무관		이석근

공사 기성검사 보고

『소화조 내부 보수공사』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

공사 기성검사 보고

『소화조 내부 보수공사』

우리센터에서 시행중인 『소화조 내부 보수공사』와 관련하여 서울시설공단으로부터 기성검사(감독) 조서가 제출되어 아래와 같이 보고 함

Ⅰ		관련근거

○ 기성검사(감독)조서 제출[서울시설공단 공사감독2처-21061(2019.12.18.)]

Ⅱ		공사현황

○ 공 사 명 : 소화조 내부 보수공사

○ 공사기간 : 2019.09.17. ~ 2020.05.31.

○ 도 급 자 : 명두건설(주)  대표 고명운

○ 도 급 비 : 1,989,699,000원

○ 공사개요 : 단면보수 2,394.5㎡, 표면처리 7,514.0㎡, 부대공 1식

Ⅲ		기성검사 현황

○ 공사감독부서 : 서울시설공단

○ 준  공  일 : 2020.05.31.

○ 기성검사일 : 2019.12.18.

○ 준공검사자

- 공사감독 : 서울시설공단 공사감독2처 감독 고정한

- 검 사 자 : 서울시설공단 공사감독2처 이동화, 이강후

Ⅳ		기성검사 검토 내용

○ 구조물 시공물량 확인 : 단면복구 및 표면보수 시공상태 및 수량 검측

○ 기성서류 : 시공사 요청 수량산출서 검토

Ⅴ		조치계획

○ 서울시설공단 공사감독2처에서 제출된 기성검사 내용에 대하여 검토 한 바, 관련 검사 내용이 적정하여 제출된 기성검사(감독) 조서 내용대로 처리코자 하며

○ 계약상대자인 명두건설(주) 대표 고명운에게 아래의 기성금액이 지급될 수 있도록 관리과에 통보하고자 함

○ 기성금액 현황

(단위 : 원)

계약금액	금회지출금액	기 지출금액	잔 액	비 고
1,989,699,000	1,159,400,000	-	830,299,000

붙임 1. 공단 기성검사(감독) 공문 및 보고서. 1부.

2. 기성검사(감독)조서

3. 기성검사원

4. 기성내역서 및 관련서류 각 1부.  끝.