＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	[우면산가압장 급수체계 개선 전기공사]설계변경 시행 및 계약의뢰

1. 안전총괄과-12421호(2019.12.18.) 관련입니다.

2. 우면산가압장 급수체계 개선 전기공사의 설계변경을 시행하오니 변경계약 해주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 우면산가압장 급수체계 개선 전기공사

나. 계 약 자: 아세아전설

다. 예산과목: 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, (우면산 아리수올림터 급수체계 개선), 시설비및부대비, 시설비

라. 변경사유: 공사물량 변경 및 보험료 등 제경비 정산

마. 변경내역

구분		당초	변경	비고
계약기간	총차	’18.4.27.∼ ’20.5.30.	(변경없음)	-
	금차(2차)	’19.1.1. ∼ ’19.12.31.	(변경없음)
계약금액	총차	585,188,460원	650,600,000원	(증)65,411,540원
	금차(2차)	529,000,000원	594,411,540원	(증)65,411,540원

붙임  1. 설계변경 검토의견서(감리단) 1부

2. 설계변경 검토보고 1부

3. 계약금액조정 심사결과 1부

4. 설계변경 내역서(총차, 2차) 2부

5. 설계변경 합의서 1부

6. 계약금액조정 검증확인서(총차, 2차, 물가변동) 3부

7. 낙찰차액 사용계획 보고 1부.  끝.

	생산부장
주무관	김인준		기전설비과장	조성태		생산부장	12/18 代서한호
협조자	주무관	이효원		주무관	안희숙
시행	기전설비과-12387	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1334	/전송	02-3146-1319	/	duulnet@seoul.go.kr	/	부분공개(3)