＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	[구의정수센터 탈수설비 개량 자동제어 공사]변경계약 의뢰

1. 기전설비과-12368호(2019.12.18.) 관련입니다.

2. 구의정수센터 탈수설비 개량 자동제어 공사의 설계변경을 시행하오니 변경계약 해주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 구의정수센터 탈수설비 개량 자동제어 공사

나. 계 약 자: 비케이전기통신 주식회사(대표 유봉근)

다. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, (정수장시설정비), 시설비및부대비, 시설비

라. 변경사유: 공사물량 변경 및 보험료 등 제경비 정산

마. 변경내역

구분	당초	변경	비고
계약기간	’19.9.4. ∼ ’19.12.20.	(변경없음)	-
계약금액	105,278,700원	97,790,000원	(감) 7,488,700원

붙임  변경계약 관련 문서 일체.  끝.

	기전설비과장
주무관	김인준		기전설비과장	12/18 조성태
협조자
시행	기전설비과-12374	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1334	/전송	02-3146-1319	/	duulnet@seoul.go.kr	/	부분공개(3)