문서번호	시설과-12801
결재일자	2019.12.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
김기봉		代최이영	12/18 신용철
협 조
	주무관			홍석현
	주무관			강정구
	주무관			최성태
	주무관			정성오

「낙산배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역」

계약금액조정 심사 소위원회 개최 결과

2019. 12.

상수도사업본부

시설과

「낙산배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역」

계약금액조정 심사 소위원회 개최 결과

물량 증․감에 대한 낙산배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역 계약금액조정 심사 소위원회 개최결과를 보고 드림.

Ⅰ		용 역 현 황

○ 용 역 명 : 낙산배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역개요 :

- 폐기물운반 : 1,594㎥,  폐기물처리 : 3,246톤 (전체분)

- 폐기물운반 : 906㎥,  폐기물처리 : 1,875톤 (2차분)

○ 용역기간 : 2018년 03월 14일 ~ 2020년  7월 13일 (전체분)

2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일 (2차분)

○ 용 역 비 : 107,745,000원(전체분), 62,060,000원(2차분)

○ 용 역 사 : (주)동보이앤시 대표 김지환

Ⅱ		소위원회 개최

○ 심의일시 : 2019년 12월 18일 10:00

○ 심의장소 : 시설안전부 회의실

○ 심의안건 : 낙산배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역 계약금액

조정 심의

○ 검 토 자 : 시설과장 등 6인

- 시설과장, 누수방지과 시설6급 최성태, 시설관리과 시설6급 강정구,    공간정보과 시설6급 홍석현, 시설과 시설6급 최이영, 시설7급 정성오

Ⅲ		심 의 내 용

○ 계약금액 조정사유 : 물량 증․감 공정 발생

구분		당초	변경	증감	비고
전체분	폐기물 운반비	1,594㎥	1,594㎥	-
	폐기물 처리비	3,246톤	3,246톤	-
2차분	폐기물 운반비	906㎥	659㎥	감247㎥
	폐기물 처리비	1,875톤	1,443톤	감432톤

- 현장 폐토사 발생물량감소

○ 용역비 증감내용

구분	당초(원)	변경(원)	증감(원)	비고
전체분	107,745,000	107,745,000	-
2차분	62,060,000	46,799,000	감15,261,000

- 전체분은 3차분시행시(2020년) 도로구간 퇴수관로부설등 폐기물추가 발생분이 예상되어 증감없이 시행후 2020년 최종물량을 반영하여 설계변경 시행예정.

Ⅳ		심 의 결 과

○ 계약물량 증,감분에 대한 적정여부 : 적 정

○ 계약물량 증,감분에 대한 단가적용여부 : 적 정

Ⅴ		조 치 의 견

○ 위와 같이 물량 증,감으로 인한 설계변경 사항을 자체 심의한 결과 원안대로 가결됨에 따라 설계변경을 시행하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 보고(공문-감리단) 1부.

2. 설계변경 내역서(총차분,2차분)각 1부.

3. 합의서 1부. 끝.