투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2019년 도로굴착복구 노면표시 건설사업관리 용역 설계 변경(최종) 시행

1. 도로보수과-127833호(2019.12.17.)와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행하는 ‘2019년 도로굴착복구 노면표시 건설사업관리 용역(서부)’에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 시행하여 변경계약 및 준공에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 도로굴착복구 노면표시 건설사업관리 용역(서부)

나. 공사기간 : 2019.03.15. ∼ 2019.12.31.

다. 계약업체 : ㈜트래픽스 대표 김희수

라. 설계변경금액

(단위 : 원)

구 분	설계변경금액		증ㆍ감	비 고
	당 초	변 경
용 역 비	6,332,700	3,427,600	감) 2,905,100

마. 설계변경 사유 : 절삭후 덧씌우기 물량감소로 노면표시 설치공사 수량감소

바. 예산과목

- 안전총괄본부도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사,시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 2019년 도로굴착복구 노면표시 설치공사 외 2건 (서부) 설계변경(최종) 시행 계획 보고 1부.

2. 건설사업관리용역 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 합의각서 1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	임동운		도로보수과장	12/18 강종훈
협조자	주무관	이상하
시행	도로보수과-12833	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 3층 도로보수과(상암동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8352	/전송	02-300-8364	/	lduon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)