투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(최종) 계약 요청(한강공원 이용 안내표지판 정비공사)

우리과에서 시행중인 「한강공원 이용 안내표지판 정비공사」를 아래와 같이 설계변경하였기에 변경 계약 요청합니다.

1. 공 사 명 : 한강공원 이용 안내표지판 정비공사(연간단가)

2. 공사내용 : 한강공원 접근 및 내부안내표지판 신설 및 정비

3. 공사기간 : 2019. 2. 20. ~ 2019. 12. 20

4. 시 공 사 : 주식회사 지아이지기업 대표 이용기

5. 변경사유 : 작업 물량 증감 및 신규공종 발생

6. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비	202,111,430	187,790,000	감)14,321,430
도 금 액	189,543,930	177,736,000	감)11,807,930
관급자재	12,567,500	10,054,000	감) 2,513,500

붙임  1. 설계변경 시행보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	석기철		시설관리과장	12/18 한흥태
협조자
시행	시설관리과-3645	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-24) 한강사업본부	/
전화	02-3780-0647	/전송	02-3780-0744	/	skc7571@seoul.go.kr	/	부분공개(5)