＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	[구의정수센터 탈수설비 개량 자동제어 공사]설계변경 시행 및 계약의뢰

1. 기전설비과-12316호(2019.12.17.) 관련입니다.

2. 구의정수센터 탈수설비 개량 자동제어 공사의 설계변경을 시행하오니 변경계약 해주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 구의정수센터 탈수설비 개량 자동제어 공사

나. 계 약 자: 비케이전기통신 주식회사(대표 유봉근)

다. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, (정수장시설정비), 시설비및부대비, 시설비

라. 변경사유: 공사물량 변경 및 보험료 등 제경비 정산

마. 변경내역

구분	당초	변경	비고
계약기간	’19.9.4. ∼ ’19.12.20.	(변경없음)	-
계약금액	105,278,700원	97,790,000원	(감) 7,488,700원

붙임  1. 설계변경 검토보고 1부

2. 설계변경심의 소위원회 결과 1부

3. 설계변경 내역서 1부

4. 설계변경 합의서 1부

5. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.

주무관	김인준		기전설비과장	조성태		생산부장	12/18 代신근호
협조자	주무관	김미애		주무관	안희숙
시행	기전설비과-12368	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1334	/전송	02-3146-1319	/	duulnet@seoul.go.kr	/	부분공개(3)