문서번호	교량안전과-21283
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
장재연		代이상문	12/19 김종호
협조

『 2019년 천호대교 보수공사 』

설계변경(1회, 정산) 검토 및 조치계획 보고

2019. 12.

교 량 안 전 과

(강구조교량팀)

-  2019년 천호대교 보수공사 -

설계변경(1회, 정산) 검토 및 조치계획 보고

『2019년 천호대교 보수공사』와 관련하여 설계변경(1회, 정산) 검토 및 조치계획을 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 설계변경(1회) 검토의견서 제출(동성한강 2019-1400호, `19.12.19)

□ 사후원가검토조건부(PS공종) 현장실사 자문회의 결과 및 조치계획

○ 교량안전과-20086호, `19.12.02.

□ 실정보고 조치계획 보고(1회)

○ 차량방호책 기초규격 및 설치연장 변경(교량안전과-13829호, `19.8.7)

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명	2019년 천호대교 보수공사	공사기간	`19.4.8~`19.12.25
공사규모	교면 방수 및 포장(18.4a) 신축이음부 유도배수로 설치 32개소 차량방호책 설치 57m
공사비(천원)	총공사비 : 436,675천원 - 도급비:374,693천원, 관급비:43,312천원, 이전비:18,670천원
계약상대자	㈜범창건설 대표 이덕재

Ⅲ		설계변경 주요내용

□ 교량안전과-13829(`19.8.7.)호로 보고한 차량방호책 설치규격, 설치연장 변경 및 신축이음 유도배수로 수량변경, 포장물량 현장 실측결과 반영 등에 따른 물량변경 및 실 작업일수 반영, 기타 제경비 정산 등으로 인한 설계변경(정산) 보고사항임.

○ 차량 방호울타리 기초(규격) 및 연장 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
기초규격	B=700mm, H=300mm	B=500mm, H=300mm
방호울타리연장	L=57m (1구간 21m + 2구간 36m)	L=21m (1구간 21 m)

○ 신축이음 유도배수로 수량 변경

변경내용	현황사진
□ 신축이음 유도배수로 변경 내용 - 조사결과 차량방호울타리 기초콘크리트 내부에 가로등 전선이 매설되어 있어 절단이 불가함에 따라 해당 공종을 제외 - 신축이음 유도배수로 설치 ▹당 초 : 30.4m ▹변경 계획 : 0m	기초콘크리트 가로등 전선

- 우천시 조사결과 신축이음부 체수가 심한 6개소(P3, P15, P19 상·하류)에 대하여 유도배수(홈파기) 시행(`19.10)

- 신축이음부 누수로 구조물 손상이 심한 P3, P27 에 대하여 내년도 천호대교 보수공사 시 신축이음장치 교체, 교각 및 코핑 손상부 보수 등을 포함하여 우선 정비예정

□ 실 시공수량 반영, PS공종 단가 확정 반영 및 제경비 정산 등

○ 유공관 설치연장 변경

- 포장구간인 램프A 및 램프E 구간은 일방향 횡단구배 구간으로 배수구가 없는 구간은 유공관 제외 (당초 : 656m → 변경 : 492m)

○ 관급자재(아스콘) 및 폐기물 정산수량 반경 변경 관련 포장두께 실측

- 램프A 포장이 설계 두께와 상이하여 관급자재(아스콘)와 폐기물 처리에 대한 수량 변경

- 설계 포장 두께 : 8.0cm → 현장실측 포장두께 : 7.0cm(램프A)

공 종	규격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·감
관급자재(아스콘)	1등급, WC-6	톤	352.8	340.0	감) 12.8
폐기물 처리	폐콘크리트	톤	37.47	0	감) 37.47
	평 삭 재	톤	259.44	210.02	감) 49.42
	혼합폐기물	톤	149.76	128.62	감) 21.14
	계	톤	446.67	338.64	감)108.03

○ 사후원가검토조건부(PS항목) 실사결과 반영

공 종	당 초 계약내역	PS실사 결 과	단 가 증. 감	비 고
아스팔트 및 방수층제거(바탕처리포함)	16,167원/㎡	10,805원/㎡	-5,362원/㎡	Ramp-A 일시공량531㎡
		8,749원/㎡	-7,418원/㎡	Ramp-E 일시공량654.5㎡
상 판 보 수	378,953원/㎡	217.208원/㎡	-161.745원/㎡	표준품셈 기준 반영

○ 교통정리원 및 신호수 실 투입인원으로 정산

- 램프A 포장이 설계 두께와 상이하여 관급자재(아스콘)와 폐기물 처리에 대한 수량 변경

- 설계 포장 두께 : 8.0cm → 현장실측 포장두께 : 7.0cm(램프A)

공 종	규격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·감
교통정리원	주간, 1인/일	일	36	0	감) 36
교통정리원	야간, 1인/일	일	42	15	감) 27

○ 기타 제경비 등 정산 반영

- 국민연금, 건강보험, 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비 등 정산 반영

Ⅳ		설계변경 검토결과

□ 공사비 증·감 내역

(단 위 :  원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 공 사 비	436,675,800	280,353,120	감 159,450,180
도 급 비	374,693,300	227,570,000	감 147,123,300
관 급 비	43,312,500	39,973,120	감 5,886,880
이전비(폐기물)	18,670,000	12,810,000	감 6,440,000

□ 주요 물량 증·감 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
아스팔트 덧씌우기	a	18.4	18.4	-
도막식 방수	㎡	1,840	1,840	-
아스팔트 및 기존방수층 제거	㎡	1,840	1,840	-
차량방호책 설치		57	21	감) 36
신축이음 유도배수로 설치	m	30.4	-	감) 30.4

Ⅴ		조 치 의 견

□ 상기 건설사업관리단 설계변경 검토보고 사항이 적정한 것으로 판단되므로 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

Ⅵ		조 치 계 획

□ `19. 12. 20. : 설계변경 및 변경계약 의뢰

□ `19. 12. 23. : 변경계약

□ `19. 12. 24. : 공사준공

붙임 : 1. 감리단 실정보고 검토서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 제비율 검증 확인서 1부.  끝.