투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자 부담공사 변경 승인(강변 SK VIEW)

1. 디앤드와이건설 주식회사 디와이(구의)19-021(2019. 12. 11.) 및 교통관리과-17452(2017. 6. 23.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 교통안전시설물 원인자 부담공사 변경 승인 하오니「교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항」을 지켜 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 변경승인 내용

○ 주요 변경사항

- 추가 교통규제심의 사항 반영

(차량등 1면 3색 → 화살표 1면 3색, 지주 부착대 7m → 11m 변경, 보조등 설치 등)

- 신호 케이블 지중화공사 관리청 도로굴착심의 및 협의로 인한 공사기간 부족으로 공사            기간 변경

○ 공사기간 변경

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
준공기한 연기	승인일로부터 ~ 2019. 10. 30.	승인일로부터 ~ 2020. 12. 31.

**********************************

붙임  1. 원인자 준수사항 1부

2. 원인자 변경 승인요청 공문 1부

3. 추가 교통규제심의 문서 1부

4. 변경 내역서 1부

5. 변경전후 도면 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	디앤드와이건설 주식회사 대표이사,대영유비텍(주) 대표이사,서울광진경찰서장(교통과장),서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
주무관	유정하		기전과장	12/19 오준식
협조자
시행	기전과-6414	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/		/	부분공개(5)