문서번호	기전과-14256
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		서수일	12/19 代박대군
협조
	주무관		정법관

『금화터널 조명설비 개선사업 전기공사』

제경비 정산 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  12.

서부도로사업소

(기 전 과)

『금화터널 조명설비 개선사업 전기공사』

제경비 정산 검토보고

『금화터널 조명설비 개선사업 전기공사』시행 중 시공업체로부터 제경비 정산 등에 대한 실정보고가 있어 검토 후 변경계약 추진하고자 함.

관련 근거

□「금산*******01(2019.12.19.)」: 실정보고의 건

공사 개요

□ 공  사  명 : 금화터널 조명설비 개선사업 전기공사

□ 공사 위치 : 금화터널(서울시 서대문구 현저동 ~ 신촌동)

□ 계약 금액 : *************

□ 계  약  일 : 2019. 10. 29.

□ 착  공  일 : 2019. 10. 30.

□ 준공 기한 : 2019. 12. 23.

□ 계약상대자 : *********************

□ 주요 공사 내용

- 터널 기존 등기구 철거(496등) 및 LED 등기구 설치(624등)

- 디밍제어설비 설치

- 조명 분기 접속 등 기타 부대시설 공사

변경 사항

□ 금액 변경

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 · 감
총 공 사 비		***********	***********	*****************
도급비	공급가액	***********	***********	*****************
	부가가치세	**********	**********	*****************
	계	***********	***********	*****************

- 예산과목

· 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계),

도로시설물 노후 조명설비 개선, 시설비

· 기후대기과, 기후변화 총괄 대응, 에너지이용 합리화(일반회계),

공공기관 LED조명 보급 사업, 시설비

□ 변경 사유 : 제경비 정산

- 보험료(건강, 노인장기요양, 연금), 퇴직공제부금비 : 증빙서류 미제출

- 안전관리비(교통정리) : 교통정리 인력 실투입 수량 및 노임 적용

- 폐기물 처리비 : 폐램프 처리 실거래금액 적용

□ 세부 내용

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 · 감
보험료	건강	*********	*	******************
	노인장기요양	*******	*	*****************
	연금	*********	*	******************
퇴직공제부금비		*********	*	******************
안전관리비(신호수)		**********	*********	******************
폐기물처리비		*********	*********	*****************

조치 의견

□ 계약상대자로부터 실정보고서 접수 후 내용검토 결과, 제경비 정산관련 증빙서류가 타당하다고 판단되어 상기 내용에 따라 변경계약 추진하고자 함.

향후 계획

□ ’19. 12. 19. : 변경계약 의뢰

□ ’19. 12. 23. : 준공계 접수

□ ’19. 12. 24. : 준공검사

붙임  1. 실정보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.