문서번호	치수과-17983
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개
방침번호

지방시설주사		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
문철		백원기		민병기		12/19 손경철
협조

★ ◉

- 도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사 -

기성(1회)검사 검토 보고

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
기타 고려사항		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
		●
타자원 활용		●	서울시	:		유 ☑ ( 하천관리과 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사 -

기성(1회)검사 검토 보고

우리 구에서 시행중인 『도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사』에 대하여 기성검사원이 접수되어 검토 후 보고드림.

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사

○ 기    간: 2019. 9. 10. ~ 2020. 5. 30.

○ 규    모

- 하수관 전체굴착(D300 ~ D600mm, L=1,047m)

- 하수관 부분굴착(D450 ~ D900mm, N=26개소)

○ 계약금액: 1,272,015천원

○ 계 약 자: ㈜샘코건설

□ 보고 내용

○ 「도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사」에 대하여 기성검사원이 접수되어 관련 서류 및 현장 확인한 바, 계약내용과 같이 적정히 공사 시공됨.

○ 기성금 청구내역

계 약 금 액	1,272,015,640원
전회 기성	-	%	기지급	선급금	220,000,000원
				기성금	-
금회 기성	825,440,000원	65%
				노무비	125,415,400원
기성 잔액	446,575,640원	35%
				계	345,415,400원
청구 및 지급금액	금557,024,600원 [(노무비 125,415,400+선금 143,000,000(65%)공제)]

□ 조치 의견

○ 기성검사 결과, 설계서 및 그 밖의 계약 내용과 같이 시공되었기에     기성처리코자 함.

붙임  기성검사원 지정요구 및 검사의뢰서 1부.