문서번호	기전설비과-12497
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산관리과장
임은비		조성태	대결 12/20 신근호
협 조
	기획예산과장			박재희
	재무회계과장			김분숙
	주무관			문정주

- 수유6배수지 건설공사 (전기공사) -

설계변경 및 심의 소위원회 개최 계획

2019. 12.

생   산   부

【기전설비과】

- 수유6배수지 건설공사 (전기공사) -

설계변경 및 심의 소위원회 개최 계획

수유6배수시 건설공사(전기공사 2차분)과 관련 감리단에서 설계변경 도서가 접수되어 아래와 같이 검토결과를 보고함.

Ⅰ				관 련 근 거

❍ 설계변경 서류 제출 : 한국종합2019-12-684호(‘19.12.19)

Ⅱ				사 업 개 요

❍ 공 사 명 : 수유6배수지 건설공사(전기공사)

❍ 공사개요 : 배수지 증설공사(증3,100㎥)에 따른 부대 전기설비 공사

❍ 시공업체 : 지웅전설(대표 한재연)

❍ 감리회사 : 한국종합기술(책임건설사업관리기술자 최형출, 전기 전유택)

❍ 공사기간 및 계약금액

구 분	공사기간	계약금액(원)
2차분	‘19.01.01.~’19.12.31.	102,770,530
총차분	‘18.07.05.~’20.05.30.	121,537,190

Ⅲ				설계변경 보고

❍ 계약금액 변경(감 : 2,430,500원)

(단위 : 원)

구 분	공 사 비		증·감
	당 초	변 경
2차분	102,770,530	100,340,000	감)2,430,530
총차분	121,537,190	119,106,660	감)2,430,530

- 계약금액조정검증시스템 : 제비율검증완료(붙임4)

❍ 설계변경 주요내용

공 종	변경내용	비 고
가, 동력 설비공사	1) 계약용량 증가에 따른 인입전선 케이블 및 전선관 추가 2) 전등 전열용 분전함 삭제 및 LV-1반 확대 3) LV-1반 옥외 설치에 따른 전력간선 케이블 및 전선관 감소	관련문서 : 북부수도-18252호(‘19.09.26)
나. 건축전기 설비공사	1) LV-1반 옥외 설치에 따른 전선 및 전선관 증가
다. 계측제어 설비공사	1) CCTV 위치 변경 및 유량계와 수위계 센서 변경에 따른 케이블 및 전선관 길이 단축 2) CCTV 영향을 피하기 위해 피뢰설비 2개소 추가 설치

※ 낙산배수지 건설공사(전기공사) 실정보고 검토(기전설비과-10846호 ‘19.11.7)

Ⅳ				소위원회 개최 (설계변경 사전심의)

❍ 개최근거 : 본부 계약심사과-227(‘19.01.20.)

❍ 일  시 : ‘19. 12. 20(금)

❍ 장  소 : 생산부 회의실

❍ 심사위원

- 팀장 : 기전설비과장

- 위원 : 총4명 (타부서 1/2지정)

· 기전설비과 주무관 김영준, 김인준

· 기술진단과 주무관 이민화, 채규성

❍ 주요 심의내용

- 물량변경 적정 여부

- 계약금액 변경 적정 여부

- 보험료 정산 등 제경비 적정 여부

Ⅴ				행 정 사 항

❍ 상기 보고 내용과 같이 계약 물량 및 금액 변동사항을 설계변경 사전심의 소위원회 개최를 통해 검토 후,

❍ 재무회계과에 계약 변경요청하고 감리업체에 변경사항 통보.

붙임 1) 전기공사 설계변경 요청(감리단) 1부.

2) 합의서 1부

3) 설계변경내역서(총차분, 2차분) 1식

4) 제비율 검증결과(총차분, 2차분) 1식.  끝.