문서번호	치수과-18053
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개
방침번호

★주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장
박철홍		김성신		민병기		전결 12/20 손경철
협조
	재무과장		홍명안
	계약팀장		양영종

★ ◉

「2019년 하수도 준설(물청소)공사(단가계약), 준설토 폐기물 처리용역」

설계변경(최종) 검토 보고

2019. 12.

성   동   구

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 시비 재배정 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

설계변경(최종) 검토 보고

2019년 우리 구에서 추진 중인 하수도 준설에 대한 최종 준설물량을 정산하여 본공사와 폐기물 처리용역에 대한 준공을 추진하고자 함

Ⅰ		사업현황

○ 사 업 명: 2019년 하수도 준설(물청소)공사(단가계약)

○ 사업기간: 2019. 3. 11. ~ 2019. 12. 31.

○ 공사개요: 하수관로 준설 6,250㎥, 세정 83,100m, 빗물받이 준설 14,000개소 등

○ 도 급 자: (주)제일토목 대표 김현녀

○ 도 급 비: 금1,972,280,000원(금일십구억칠천이백이십팔만원)

Ⅱ		설계변경 사유

○ 시비 확보에 따른 준설물량 증가(기 보고 완료)

- 시기금 재배정(`19.5.9.) 401백만원(청계천 및 빗물펌프장 준설)

- 시비 재배정(`19.8.8.) 150백만원(하수관로 준설 및 물청소)

- 시비 재배정(`19.10.10.) 400백만원(마장도시재생지역 하수관로 준설)

- 시비 재배정(`19.10.17.) 240백만원(중랑천 및 청계천 준설)

○ 낙찰차액(138백만원) 및 이전비(120백만원) 사용 정산

- 시비확보에 따른 준설물량 증가에 수반한 준설토 처리에 사용

(준설토 처리: 당초 1,000㎥ → 변경 3,428㎥)

- 보수보강 공사현장 준설토(72㎥) 처리에 사용(뚝섬로 358, 아차산로 72)

- 뚝섬, 사근, 응봉 빗물펌프장 추가 준설 시행(작업지시 17차 424㎥)

Ⅲ		설계변경 내역

▢ 2019년 하수도 준설(물청소)공사(단가계약)

○ 도급비 변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	2,159,250,000	2,302,000,000	증142,750,000
도 급 비	1,972,280,000	2,098,229,000	증125,949,000
이 전 비(준설토)	186,970,000	203,771,000	증 16,801,000

○ 주요물량 정산 내역

공 종		단위	수 량				비고
			당 초	변경(정산)	증 ․ 감
준설공	인력+흡입준설	㎥	1,700	1,929	증	229
	암거준설(기계)	㎥	2,200	2,176	감	24
	흡입준설	㎥	1,900	1,997	증	97
	바켓준설	㎥	450	507	증	57
	하천준설	㎥	18,203	17,950	감	253
물청소	하수관물청소	m	83,100	111,442	증	28,342
빗물받이준설공	빗물받이 흡입준설 1호	개소	1,500	1,416	감	84
	빗물받이 흡입준설 2호	개소	8,000	7,943	감	57
	빗물받이 인력준설 1호	개소	3,300	3,340	증	40
	빗물받이 인력준설 2호	개소	1,200	1,017	감	183

▢ 2019년 하수도 준설토 폐기물 처리용역

○ 도급비 변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총용역비	58,207,000	203,771,000	증145,564,000
도 급 비	58,207,000	203,771,000	증145,564,000

○ 주요물량 정산 내역

공 종		단위	수 량				비고
			당 초	변경(정산)	증 ․ 감
폐기물	준설토운반	㎥	1,000	3,500	증	2,500
	준설토처리	톤	1,600	5,601	증	4,001

Ⅳ		조치의견

○ 상기 내용과 같이 준설공사 물량을 정산·반영하여 본공사와 준설토 처리용역에 대한 설계변경(최종)을 시행하고, 향후 준공처리하고자 함

붙임  설계변경내역서(공사, 용역) 및 검증확인서 각 1부.  끝.