문서번호	도시재생과-11565
결재일자	2019.12.20.
공개여부	대시민공개

★주무관	캠퍼스타운조성T/F팀장	도시재생과장		도시재생기획단장
최지훈	이이용	신신재		12/20 代이용철
협 조 자
	예산담당		유미조
	계약담당		강은주

「안암동 캠퍼스타운 스마트스트리트 조성 사업」

사고이월 추진계획 보고

2019. 12.

도시재생기획단

(도시재생과)

「안암동 캠퍼스타운 스마트스트리트 조성 사업」

사고이월 추진계획 보고

안암동 참살이길의 문화특성화 및 상권활성화를 위해 추진 중인 「안암동 캠퍼스타운 스마트스트리트 조성 사업」외 1건에 대해 사고이월하여 업무추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		사업개요

구 분	스마트가로등 및 포털서비스 구축 용역	스마트스트리트 조성 전기공사
위 치	고려대로24길(참살이길, 안암역~안암오거리)
기 간	2019.9.4.~2020.06.29.	2019.7.24.~2020.04.30.
내 용	스마트가로등 17개소 신규 설치·포털서비스 구축을 통한 청년창업 지원 및 지역상권 활성화	기존 가로등 17개소 철거 및 스마트가로등 17개소 설치를 위한 기초 및 전기·통신 관로 신설
계 약 자	㈜인콘 대표 김동원	기찬정보통신㈜ 대표 홍석기
계약금액	1,208,020,000원	94,507,330원

Ⅱ		추진경위

□ 2014. 12. : 안암동지역 캠퍼스타운 우선 사업지 선정

□ 2017. 12. : 안암동 캠퍼스타운 활성화계획 수립

□ 2018. 12. : 안암동 캠퍼스타운 스마트스트리트 조성 기본 및 실시설계 용역완료

□ 2019. 07.  : 안암동 참살이길 스마트스트리트 조성 전기공사 계약

□ 2019. 09.  : 안암동 참살이길 스마트가로등 및 포털서비스 구축용역 계약

Ⅲ		사고이월 계획

□ 사고이월 사유

◯ 서울시와 안암동 캠퍼스타운 지원센터와의 사전 협의, 제안서평가

위원회 개최 등으로 인해 스마트가로등 및 포털서비스 구축용역 계약이

지연됨(원인행위 필)

◯ 스마트가로등 및 포털서비스구축 사업과 연계한 스마트스트리트

체험관, 관제실 설치는 스마트가로등 및 앵커시설 조성이 완료된 이후 규격에 맞는 시설물 설치를 위해 시기조정 등으로 원인행위 미필

(소프트웨어 발주 및 조달청 구매)

◯ 상기내용과 같이 금년도 회계연도 사업예산 집행에 어려움 등으로 예산을

사고이월 하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 추진 사업비(전액 시비)

구분		총사업비	지출액*	사고이월액
				원인행위 필		원인행위 미필
				도급비	관급자재	낙찰차액
스마트 가로등 구축용역	2018 명시이월	1,040,231,760	436,221,760	604,010,000	-	-
	2019 예산	360,053,240	167,788,240	-	-	106,310,990
전기공사	2019 예산	114,469,860	-	94,507,330	5,932,860	-
계		1,514,754,860	604,010,000	698,517,330	5,932,860	106,310,990
사고이월액				810,761,180원

* 낙찰차액 : 안암동 참살이길 대학문화 가로조성공사 공사비 증액분, 안암동 창업 앵커시설 조성 용역 2건 계약금액 제외[낙찰차액 사용계획 보고(도시재생과-10918호)]

□ 사고이월 금액

2019년 예산		2018년 예산
원인행위 필	원인행위 미필	원인행위 필	원인행위 미필
100,440,190원	106,310,990원	604,010,000원	-
일괄지출 원인행위 요청액(원인행위 미필맥 포함) : 810,761,180원

Ⅳ		처리계획

□ 회계연도 내 지출이 어렵고, 원인행위가 불가한 사업예산에 대하여,   재무과에 원인행위 요청을 통해 사고이월하여 사업 추진에 만전을

기하고자 함

□ 예산과목

◯ 도시재생과, 지역균형발전개발, 효율적인 도시개발 계획 및 관리, 2019년 고려대

안암동 캠퍼스타운조성사업, 시설비 및 부대비, 시설비

◯ 도시재생과, 지역균형발전개발, 효율적인 도시개발 계획 및 관리, 2018년 고려대

안암동 캠퍼스타운조성사업, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  낙찰차액 사용계획 보고서 1부.  끝.