＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(2회) 계약의뢰(2019년 서강동외 7개동 상수도공사)

우리과에서 시행중인 『2019년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여        아래와 같이 설계변경(2회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공  사  명 : 2019년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계약대상자 : ************

다. 공사  기간 : 2019. 06. 10. ~ 2020. 6. 30.

라. 설계변경 금액내역                                             (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총 공사비		655,976,530	655,976,530	-
도급비	1차수(2019년)	432,249,000	354,876,500	-
	2차수(2020년)	223,727,530	301,100,030	-

마. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 계약물량 증 ․ 감                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요공종
합 계	655,976,530	655,976,530	변동없음
1.토 공	102,487,268	118,353,405	15,866,137	아스팔트포장절단 등
2.부설공	129,354,282	119,880,764	-9,473,518	스테인레스관 부설공 등
3.구조물공	20,922,810	19,041,560	-1,881,250	월형밸브실 설치공 등
4.부대공	49,207,853	47,721,019	-1,486,834	하수도 복구공 등
5.사급자재비	85,595,239	80,304,040	-5,291,199	주름마디 스테인레스강관 등
6.포장공	8,870,336	10,507,905	1,637,569	보조기층공 등
7.제경비	259,538,742	260,167,837	626,095

바. 최대정산 이행금액(1회 최대 정산금액) : 금400,000,000원

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급․배수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 급배수비, 수선유지교체비

상수도사업비용, 영업비용, 급배수비, 지원사업성시설비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

소방용수시설설치개소수, 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설설치,

시설비

소방용수시설설치개소수, 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설보수,

시설비

붙임 : 1. 설계변경내역서(2회) 1부.

2. 사전심의 의결서 1부.

3. 사전심의회 개최 결과 1부.

4. 합의서 1부.

5. 설계변경(2회) 방침서 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	김승진		급수관리팀장	김승완		급수운영과장	12/19 이병운
협조자
시행	급수운영과-22603	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 홍제동 38-69	/
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	ktmksj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)