투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	[오타수정]설계변경 시행 및 (정산)계약변경 의뢰[2019년반포달빛무지개분수유지보수공사(연간단가)]

1. 기반시설과-4184호(2019.12.17.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행 중인 ｢2019년 반포달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)｣의 정산에 따른 설계변경을 시행, 아래와 같이 계약변경을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 공 사 명 : 2019년 반포달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)

나. 계약업체 : 상림조경(주) 대표 서명현

다. 계약금액 : 금483,505,000원

라. 공사기간 : 2019.03.20. ~ 2019.12.31.

마. 변경사유 : 물량변경 및 미사용 고용보험료 등 정산

구 분		당 초	변 경	증․감액	비고
총공사비		483,505,000	464,301,000	감) 19,204,000
도급비	공급가액	439,550,000	422,091,819	증) 17,458,181	오타
				감) 17,458,181	수정
	부가가치세	43,955,000	42,209,181	증) 1,745,819	오타
				감) 1,745,819	수정
	합계	483,505,000	464,301,000	증) 19,204,000	오타
				감) 19,204,000	수정
공사기간		변경 없음

※ 설계변경 내역중 공급가액, 부가세,합계 증감액 항목중 오타 수정(금액변경없음)

바. 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원기전시설 유지관리, 시설비

붙임 1. 설계변경 시행 보고서                         1부

2. 설계변경 내역서 및 고용보혐등납부확인서   각 1부

3. 계약변경 검증확인서                          1부

4. 계약변경 정산합의 각서                       1부. 끝.

	기반시설과장
주무관	박관호		기반시설과장	12/19 代정창수
협조자
시행	기반시설과-4203	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 서울시 한강사업본부 기반시설과	/
전화	02-3780-0664	/전송	02-3870-0744	/	khanor@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)