문서번호	시설과-12885
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
정성오		代최이영	12/19 代이용구
협 조
	주무관			최이영

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

「암사배출수처리시설 증설 및 개량공사 건설폐기물 처리용역」

건설폐기물 수량변경 실정보고 검토

2019. 12.

상수도사업본부

(시  설  과)

「암사배출수처리시설 증설 및 개량공사 건설폐기물 처리용역」

건설폐기물 수량변경 실정보고 검토

배출수지 및 배슬러지지 공사과정에서 기존구조물 철거 시 추가 발생한 폐기물 물량 증가 실정보고에 대한 검토내용을 보고 드림.

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 암사배출수처리시설 증설 및 개량공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역개요

- 건설폐기물 운반 : 폐아스콘 63㎥, 폐콘크리트 261㎥

- 건설폐기물 처리 : 폐아스콘148ton, 폐콘크리트 600ton

○ 용역기간 : 2018. 09. 21.~2019. 12. 31.(총괄)

2019. 01. 01.~2019. 12. 31.(2차분)

○ 도 급 비 : 24,020,000원 (2차 : 21,597,000원)

○ 용 역 사 : (유)도성개발  대표 윤칠중

□ 보고내용(건설사업관리기술자)

○ 건설폐기물 추가 발생으로 물량 증가

- 1, 2정수장 배슬러지지 및 1정수장 배출수지 공사과정에서 기존구조물 철거 시 추가 발생한 폐콘크리트와 구내도로 정비 시 발생되는 폐아스콘 물량 반영

- 추가발생 주요 사진

#1 배출수지 흄관 보호콘크리트	#1 배슬러지지 농축조이송관 보호공	#2 배슬러지지 계단

▹ 건설폐기물 물량 증·감 내용

종 별	구분	전체			2차			비 고
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
폐아스콘	㎥	63	186	123	63	186	123
폐콘크리트	㎥	261	395	167	228	395	167

- 용역비 증·감 : 증)15,898천원

구 분	당 초	변 경	증·감
전 체	24,020,000	39,918,000	(증) 15,898,000
2차분	21,597,000	37,495,000	(증) 15,898,000

□ 건설사업관리기술자 검토의견

○ 공사과정에서 추가 발생된 콘크리트량과 중장비 이용으로 파손된 구내도로 보수물량 반영함은 타당함

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 용역계약 일반조건 “6(과업내용의 변경과 계약금액 조정)-3(그밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)”의 규정

□ 검토의견

○ 건설폐기물 발생 수량 증가로 인한 물량 반영은 건설사업관리기술인의 검토가 타당하고 용역계약 일반조건에 적정하므로,

○ 건설사업관리단의 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙 임 : 실정보고 공문 1부.  끝.