투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	'19/'20 제설작업 용역-남부(장기계속) 설계변경(제1회) 시행

1. 우리사업소에서 시행중인 『‘’19/’20 제설작업 민간위탁 용역-남부(장기계속)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회-1차분 정산) 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : ‘19/’20 제설작업 민간위탁용역-남부(장기계속)

나. 용역기간 : 총차분 2019. 11. 14. ~ 2020. 03. 30.

(1차분 2019. 11. 14. ~ 2019. 12. 31.)

*********************************************

라. 계 약 자 : 양지기초건설 대표 백종일

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총용역비		299,451,750	299,451,750	증) 11,415,000
도급비	1차분	96,880,000	108,295,000	증) 11,415,000
	2차분	202,571,750	191,156,750	감) 11,415,000
	총차분	299,451,750	299,451,750	-

바. 설계변경 사유

- 비상근무 내역 1차분 정산에 따른 물량 증·감

사. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리,제설대책추진,사무관리비

붙임 1. 방침서 1부

2. 설계변경내역서(총차분, 1차분) 각1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	박종헌		도로보수과장	12/19 代정철식
협조자
시행	도로보수과-7676	(		)	접수		(		)
우			/	www.seoul.go.kr
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	pjh0368@seoul.go.kr	/	부분공개(5)