문서번호	물재생계획과-16831
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	하수악취저감팀장	물재생계획과장
최용진	한상각	12/19 代김준형

악취저감사업 악취조사 용역 설계변경 보고

2019. 12.

물순환안전국

(물재생계획과)

악취저감사업 악취조사 용역 설계변경 보고

하수도시설물 악취저감사업 악취조사 계약금액 변경에 따라 설계 변경을 시행하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2019년 하수도시설물 악취저감사업 악취조사 용역

○ 용역기간 : 2019. 05. 16 ~ 12. 30

*********************

○ 용 역 사 : ㈜한국하수도기술

○ 주요과업내용

- 도심명소, 도시재생지역 사업대상 선정 및 전·후 악취조사

- 악취저감사업 추진 전·후 악취조사 및 평가

□ 추진경위

○ ‘19.4월 : 하수도시설물 악취저감사업 악취조사 용역계획 방침

○ ‘19.5월 ~ : 계약완료 및 사업추진

○ ‘19.11월 : 계약기간 설계변경

□ 설계변경내용

○ 변경내역 : 계약금액 감액(계약기간 변동없음)

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	***********	***********	*************

○ 변경사유 : 하수악취 조사지점 감소로 감액*************

□ 조치계획 : 계약변경

○ 용역 계약변경 의뢰(→재무과), 용역사인 ㈜한국하수도기술과 변경계약 체결

붙 임 : 사업계획 방침서, 계약변경 합의각서, 변경내역서 각 1부.  끝.