＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약 의뢰(독산3동991-18~독산2동1038-1번지 외 1개소 노후송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『독산3동991-18~독산2동1038-1번지 외 1개소 노후송배수관 정비공사』에 대하여 설계변경을 시행하고 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 독산3동991-18~독산2동1038-1번지 외 1개소 노후송배수관 정비공사

나. 계 약 자 : 성산건설(주) 대표자 안대현

다. 계약기간 : 2019. 5. 14. ~ 2020. 1. 8.

라. 공사개요 : D=700~800mm, L=1,061m

마. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 비	1,513,867,900	1,552,650,000	증) 38,782,100

바. 설계변경 사유 : 공종별 물량 증,감 및 신규공종 발생

사. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비(노후송배수관정비)

붙임  설계변경 시행 및 관련서류 각 1부.  끝.

	급수운영과장
★주무관	유동훈		급수관리팀장	이일로		급수운영과장	12/19 이성환
협조자
시행	급수운영과-23855	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4576	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(5)