＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사변경계약체결[구의정수센터 탈수설비 개량 기계공사]

1. 기전설비과-12263(2019.12.17)호와 관련입니다.

2. “구의정수센터 탈수설비 개량 기계공사”건에 대한 변경계약을 아래와 같이 체결코자 합니다.

가. 건    명 : 구의정수센터 탈수설비 개량 기계공사

나. 계 약 자 : *****************

다. 계약기간 : 2019.09.19. ~ 2019.12.20

라. 계약금액 : *******************************

마. 변경내역 : 계약금액 변경(증액)

구 분	당초	변경	증·감
계약금액	************	************	************

사. 변경사유 : 물량변경 및 제경비 정산

아. 조치사항 : 변경사항에 따른 관련 서류(내역서, 계약보증서 등) 검토 후 계약체결

붙임 : 1. 공사변경계약서(초안) 1부.

2. 합의각서 등 각 1부.  끝.

주무관	이구연		재무회계과장	김분숙		요금관리부장	12/19 代김형규
협조자
시행	재무회계과-17818	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1233	/전송	02-3146-1209	/	media_lab@seoul.go.kr	/	부분공개(5)