문서번호	물순환정책과-21774
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
송종봉	유통희	12/19 정훈모

2019년 사평역 주변
지하수 오염조사 및 정화용역 준공 보고

2019. 12.

물순환안전국

(물순환정책과)

2019년 사평역 주변
지하수 오염조사 및 정화용역 준공 보고

2019년 사평역 주변 악취 저감을 위한 지하수 오염조사 및 정화용역의 과업을 이행하였으며, 제출한 성과품이 적합하므로 준공처리 하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 사평역 주변 지하수 오염조사 및 정화용역

○ 위    치 : 지하철 9호선 사평역 주변(서초구)

○ 용역기간 : 2019. 2. 21. ~ 12. 17.

○ 수행기관 : 한국농어촌공사 경기지역본부

○ 용 역 비 : 290,510천원

○ 주요 과업내용

- 지하수위 관측

- 지하수 시료채취 및 오염도 분석

- 오염지하수 양수 및 위탁 처리

- 화학적 산화공법에 의한 VC 저감 평가 등

□ 추진일정

○ ’19.01.08. : 사업계획 수립

○ ’19.01.25. : 기술용역 타당성 심사 요청(회신: 적정, 2.1.)

○ ’19.02.07. : 일상감사 의뢰(회신: 적정, 2.15.)

○ ’19.02.19. : 용역계약 의뢰

○ ’19.02.21. : 용역업체 계약체결 및 용역시행

○ ’19.12.04. : 용역 보고회 및 자문회의

○ ’19.12.17. : 용역준공 보고서 제출

□ 추진결과

○ 과업 추진실적(총괄)

과 업 내 용		계 획	실 적	비고
모니터링 및 오염도 분석	지하수위 관측	630회	661회	증 31회
	지하수 시료채취	200점	251점	증 15점
	지하수 오염물질 분석	200점	215점	증 15점
오염지하수 정화	양수 및 위탁처리	620톤	620톤
VC 저감을 위한 화학적산화 서방공법 적용		1식	1식

○ 지하수위 관측

- 조사지점 : 35개 관측공

- 지하수위 변동폭(해발) : 최저 6.03m ~ 최고 13.08m

- 유동방향 : 지하철 9호선 터널 방향(북동쪽 또는 북서쪽)

○ 오염도 분석

- 시료채취 : 58개소(관측공 34공, 양수정 2공, 정화시험 2공, 주변관정 2공, 우수관거 1개소, 터널 내 17개소)

- 염소계 유기화합물 분석결과                       (단위 : ㎎/L)

구 분		TCE	c-DCE	t-DCE	1,1-DCE	VC	ETH
지하수 정화기준		0.03	-	-	0.03 (먹는물기준)	0.002 (먹는물권고)	-
터 널	최 대	0.339	0.877	0.190	0.016	0.657	0.314
	평 균	0.022	0.097	0.020	0.001	0.080	0.019
관측정	최 대	0.041	1.103	0.147	0.026	2.058	1.368
	평 균	0.008	0.036	0.006	0.001	0.086	0.051
양수정 및 정화시험공	최 대	0.224	0.528	0.111	0.027	1.452	0.644
	평 균	0.017	0.197	0.035	0.003	0.283	0.094

※ 정화기준 초과 관정 : '04년 22개 관정 중 21개(95.5%)
→ '19년 41개 관정 중 19개(46.3%)

○ 오염지하수 양수 및 위탁처리 : 620톤

- 양수정 : 2개소(PW-1, 2)

- 양수량 : 620톤 ⇒ 전량 폐수처리업체 위탁처리((주)미래E비젼)

○ 산화공업을 적용한 VC 저감 평가

- 고농도 VC가 검출된 관측정에 산화제를 주입하여 VC 저감 유도

- 고농도 VC를 비롯한 염소계유기화합물 저감 효과가 높게 나타남.

〈 산화공법에 의한 염소계 유기화합물 저감효율 〉

구 분	TCE	c-DCE	1,1-DCE	VC	ETH
PW-1 양수정	59%	64%	72%	68%	65%
PW-2 양수정	81%	63%	61%	68%	64%

※ 사평지구 대수층에 축적되고 있는 고농동 VC나 잔류한 염소계유기화합물의 처리 및 확산방지에 효과적일 것으로 판단됨

○ 용역준공 성과품 납품 : 정화용역 보고서

- 용역보고서 책자 15부 및 CD 2매

〈 성과품 납품 사진 〉

□ 향후계획

○ 2019년 정화용역 준공 처리

- 준공내역을 확인한 결과, 과업내용서에 따른 과업을 이행하였으며 제출한 성과품이 적정하므로 본 용역에 대해 준공처리하고자 함

○ 2020년 사평역 주변 지하수 오염조사 및 정화 지속 추진

붙임  준공신고서 등 준공서류 1부.  끝.