투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	설계변경 시행 및 (정산)계약변경 의뢰[2019년반포달빛무지개분수유지보수공사(연간단가)]

1. 기반시설과-4184호(2019.12.17.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행 중인 ｢2019년 반포달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)｣의 정산에 따른 설계변경을 시행, 아래와 같이 계약변경을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 공 사 명 : 2019년 반포달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)

나. 계약업체 : 상림조경(주) 대표 서명현

다. 계약금액 : 금483,505,000원

라. 공사기간 : 2019.03.20. ~ 2019.12.31.

마. 변경사유 : 물량변경 및 미사용 고용보험료 등 정산

구 분		당 초	변 경	증․감액	비고
총공사비		483,505,000	464,301,000	감) 19,204,000
도급비	공급가액	439,550,000	422,091,819	증) 17,458,181
	부가가치세	43,955,000	42,209,181	증) 1,745,819
	계	483,505,000	464,301,000	증) 19,204,000
공사기간		변경 없음

바. 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원기전시설 유지관리, 시설비

붙임 1. 설계변경 시행 보고서                         1부

2. 설계변경 내역서 및 고용보혐등납부확인서   각 1부

3. 계약변경 검증확인서                          1부

4. 계약변경 정산합의 각서                       1부. 끝.

	시설부장
주무관	박관호		기반시설과장	라철흠		시설부장	12/19 전영주
협조자	주무관	임영준
시행	기반시설과-4197	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 서울시 한강사업본부 기반시설과	/
전화	02-3780-0664	/전송	02-3870-0744	/	khanor@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)