＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	낙산 및 수유6배수지 건설사업관리용역 설계변경 시행(총차분 2회, 3차분 1회)

1. 우리본부에서 시행중인 건설사업관리용역에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 낙산 및 수유6배수지 건설공사 감독 권한대행등 통합건설사업관리용역

2) 용역기간 : 총차분 ’17. 12. 18.~’20. 7. 4.(3차분 ’19. 1. 1.~’19. 12. 31.)

3) 계약금액 : 총차분 1,027,620,000원(3차분 462,424,000원)

4) 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비및부대비, 감리비
[추산번호 : 낙산배수지(21107000) → 369, 수유6배수지(21106000 → 1035)]

5) 계 약 자 : ㈜한국종합기술 대표 이상민 외 1개사

나. 설계변경 현황 및 사유

1) 계약금액

(단위 : 원)

구 분		총차분			3차분(금회)
		당초	변경	증・감	당초	변경	증・감
총 용 역 비 ( 도 급 비 )		1,027,620,000	1,027,620,000	-	462,424,000	454,576,000	-7,848,000
사업별	낙산 배수지	441,877,000	441,877,000	-	198,840,000	195,468,000	-3,372,000
	수유6 배수지	585,743,000	585,743,000	-	263,584,000	259,108,000	-4,476,000

2) 계약기간 : 변경없음

3) 변경사유 : 토목 초급 건설사업관리인 투입일 조정(3차분 9.9→9.0월, 0.9월 감)

{※ 감 0.9월은 4차분 투입예정으로 총차분 계약금액 변경 없음}

붙임 : 1. 건설사업관리자 설계변경 제출 공문 1부.

2. 설계변경 내역서(총차분, 3차분) 각 1부.

3. 설계변경 합의서 1부

4. 토목 초급 건설사업관리인 투입 승인 공문 1부.  끝

★주무관	문정주		시설과장	代최이영		시설안전부장	代이용구		상수도사업본부부본부장	전결 12/20 代이상국
협조자	주무관	박은미		주무관	이효원		주무관	안희숙
재무회계과장	김분숙
시행	시설과-12935	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1493	/전송	02-3146-1529	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)