문서번호	급수운영과-23985
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	급수관리팀장	급수운영과장
유동훈	이일로	12/20 이성환
협 조

설계변경 검토보고(1회)

2019년 관악,금천구 관내 상수도공사 (송배수관정비,포장복구 등) 건설폐기물 처리용역

2019. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 검토보고(1회)

2019년 관악,금천구 관내 상수도공사 (송배수관정비,포장복구 등) 건설폐기물 처리용역

「2019년 관악,금천구 관내 상수도공사 (송배수관정비,포장복구 등) 건설폐기물 처리용역」 업무수행 중 신규공사 발주 등 계약물량 증·감 사항 발생으로 설계변경(1회)을 시행하여 용역 수행에 만전을 기하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2019년 관악,금천구 관내 상수도공사 (송배수관정비,포장복구 등) 건설폐기물 처리용역

○ 용역개요 : 건설폐기물 운반 3,129㎥, 건설폐기물 처리 7,347톤

○ 계약기간 : 2019. 5. 31. ~ 2020. 7. 31. (1차분 : 2019. 5. 31. ~ 2019. 12. 31)

○ 계약금액 : 금230,516,000원

○ 계약상대자 : 산양환경산업(주) 대표 장택무

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 기획예산과-8486(2019.7.12.)호 “문래동 혼탁수 발생 관련 종합개선대책”

□ 설계변경 사유

○ 「문래동 혼탁수 발생 관련 종합개선대책(기획예산과-8486(2019.7.12.)호」 에 따른 하반기 노후 상수도관 개량공사(시흥동 999번지 외 3개소 배급수관(압입) 정비공사 외 1건) 시행과 기시행 공사현장 여건변화로 인한 폐기물 처리 물량 변동 및 그에 따른 계약금액 조정

□ 설계변경 현황

○ 계약금액 변경 – 증) 136,873,000원

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
1차수 계약금액	161,361,000	326,090,000	증)164,729,000
2차수 계약금액	69,155,000	41,299,000	-27,856,000
총차 계약금액	230,516,000	367,389,000	증)136,873,000

○ 폐기물 처리물량 변동사항

공 종	당 초	변 경	증·감
폐아스콘 운반	3,003㎥	4,382㎥	증) 1,379㎥
폐콘크리트 운반	126㎥	715㎥	증) 589㎥
폐아스콘 처리	7,057톤	10,300톤	증) 3,243톤
폐콘크리트 처리	290톤	1,645톤	증) 1,355톤

□ 조치계획

○ 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하여

심의 결과에 따라 설계변경계약 시행 등 용역 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 사전심의 요청서 1부.

3. 폐기물처리 물량 정산내역 및 시설공단 관련공문 각 1부.  끝.