＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(내곡지구 이중화 배관부설공사)

우리사업소에서 시행하여 서울시설공단에 공사감독 위탁중인『내곡지구 이중화 배관부설공사』에 대하여 설계변경 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경 시행 하고자 합니다.

가. 공 사 명: 내곡지구 이중화 배관부설공사

나. 공사개요: 당초 D=500㎜, L=800m

변경 D=500㎜, L=874m(증 74m)

다. 설계변경사유:공종별 계약물량 증·감 및 신규공종 발생

라. 계 약 자: **************

마. 계약기간: 2019. 5. 27. ~ 2019. 12. 22.

바. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

(중블록무단수 – 21102)

사. 하자기간: 준공검사일로부터 3년

아. 변경금액                                               (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
도 급 비	442,753,330	462,957,000	증 20,203,670

붙임  1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 관련서류 각 1부.

3. 합의서 1부.  끝.                               증추산필 2019. 12. 20.

시설운영팀장	전동근		주무관	서은영		시설관리과장	代전동근		강남수도사업소장	12/20 조세연
협조자	주무관	제영도
시행	시설관리과-26689	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4906	/전송	02-3146-4939	/		/	부분공개(6)