문서번호	급수운영과-28652
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
급수관리팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
주은선	김정수	12/20 배현숙
협 조

설계변경 시행계획(제1회)

(2019년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역)

2019. 12.

강서수도사업소

(급수운영과)

설계변경 시행계획(제1회)

(2019년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역)

「2019년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역(단위공사.포장복구)」 과 관련 공사장별 건설폐기물의 물량 증감이 발생되어 이에 따른 설계변경을 시행하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2019년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역(단위공사,포장복구)

○ 계약금액 : ********************

○ 용역기간 : 2019. 4. 17. ~ 2020. 6. 30.

○ 계 약 자 : ㈜녹색사람들외 1개사  대표 채복희 외 1인

□ 설계변경 사유

○ 설계변경 근거

<설계변경 근거>

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제77호)

- 제14장 용역계약 일반조건 제6절(과업내용의 변경과 계약금액 조정)

○ 설계변경 사유

- 공사신규 발생 및 공사장별 건설폐기물 운반 및 처리 물량증감에 따른 변경

• 물량증가 : 폐아스콘 운반(야간) 외 2종

• 물량감소 : 폐아스콘 운반(주간) 외 4종

□ 설계변경 내용

○ 설계변경 금액

구 분	금 액		증 ․ 감
	당 초	변 경
총용역비	***********	***********	**********
1차수	***********	***********	**********
2차수	**********	**********	***********

○ 주요 물량증감 내역

공 종	규격	단위	당 초	변 경	증 ․ 감
폐아스콘 운반	주간	㎥	2,912	1,250	감) 1,662
폐아스콘 운반	야간	㎥	346	2,496	증) 2,150
폐아스콘(절삭) 처리	-	톤	2,034	2,300	감) 266
콘크리트 처리	-	톤	736	554	감) 182

□ 조치계획

○ 설계변경 심의위원회 개최 후 설계변경계약 추진

- 상기 설계변경(연간단가)건에 대하여 비위사항이 아닌 경우 ’19년 12월까지 한시적으로 도급비 10%이상 증액 되더라도 재발주없이 설계변경으로 시행하며, 우리사업소 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경계약을 추진코자 함

※ 관련문서:(누수방지과-7295호, 2019.7.2.)(안전총괄과-643호, 2019.1.22.)

붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.